문서번호	시설과-2568
결재일자	2018.10.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설과장	동부공원녹지사업소장
여은솔	김영균	진병규	10/12 안수연
협 조

「보라매공원 테마 물놀이터 조성공사」

관급자재 납품기한 연기 검토보고

2018. 10.

동부공원녹지사업소

(시  설  과)

「보라매공원 테마 물놀이터 조성공사」

관급자재 납품기한 연기 검토보고

『보라매공원 테마 물놀이터 조성공사』와 관련하여 관급자재의 납품기한 연기 사항이 발생하여 아래와 같이 검토 보고 드림

Ⅰ		공 사 개 요

❍ 공 사 명 : 보라매공원 테마 물놀이터 조성공사

❍ 도 급 액 : 금260,933,900원(금이억육천구십삼만삼천구백원)

❍ 도 급 사 : ***************

❍ 공사기간 : 2018. 09. 10. ~ 2018. 12. 08.

❍ 공사내용 : 물놀이형 수경시설 및 기계설비 설치 등

Ⅱ		검 토 내 용

❍ 건    명 : 보라매공원 테마 물놀이터 조성공사 관급자재 구매

❍ 관급자재 현황

물품식별번호	품 명	규 격	단 위	수 량	단가 (원)	금액 (원)
22965080	기타놀이기구	2000x280x2500mm ELW-06	대	1	4,100,000	20,500,000
22965082	기타놀이기구	2400x2400x2530mm ELW-14	대	1	7,000,000	7,000,000
22965083	기타놀이기구	1940x114x2150mm ELW-15	대	5	7,300,000	7,300,000
22965085	기타놀이기구	1690x1700x3000mm ELW-19	대	1	5,100,000	5,100,000
23108244	포설형탄성포장재	t50mm FUN-50	㎡	245	95,000	23,275,000
	조달수수료	0.54%				341,140
	합계					63,516,140

❍ 연기사유 : 본 공사 일정에 맞추어 납품기한 연기

❍ 납품기한 변경

- 당   초 : 2018. 10. 30.(포설형탄성포장재), 2018. 11. 02.(기타놀이기구)
- 변   경 : 2018. 11. 30.

❍ 지체상금 부과여부 : 미부과

- 연기사유 귀책소재 : 동부공원녹지사업소

Ⅲ		처 리 의 견

❍ 계약부서에 관급자재 납품기한 연기 의뢰하고자 함.  끝.