			중부수도사업소
수신자		급수운영과장
(경유)
제목	공사 변경계약 체결 보고(통보)[이촌역~한강대로간 송배수관정비공사]

1. 급수운영과-21874(2018.10.12.)호와 관련입니다.

2.『 이촌역~한강대로간 송배수관정비공사』 건에 대하여 아래와 같이 변경계약을 체결하고    보고(통보)합니다.

가. 계약건명 : 이촌역~한강대로간 송배수관정비공사

나. 계약업체 : ********************************

**************  ****************************

다. 계약금액 : 변경 없음

- 총 부기금액 금767,537,900원

라. 계약기간

- 당초 : 2018. 4. 10. ~ 2018. 10. 12.

- 변경 : 2018. 4. 10. ~ 2018. 10. 31.  ※기한 19일 연기

마. 변경사유: 준공기한 연기(절대공기 부족)

바. 보증서 관련사항

- 계약보증서: 보증기간연장(‘18.10.31.까지) 발행

- 선금보증서: 보증기간연장(‘18.12.30.까지) 및 가산이자(428,550원) 증액 발행

<담당자 : ***>

붙임 : 변경계약서 및 합의서 등 각 1부.  끝.

	중부수도사업소장
★주무관	김유리나		행정관리팀장	은정호		행정지원과장	代은정호		중부수도사업소장	10/12 代은정호
협조자
시행	행정지원과-28921	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 2층 행정지원과	/
전화	02-3146-2043	/전송	02-3146-2244	/	koko91@seoul.go.kr	/	부분공개(7)