투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	현장실정보고(2차) 승인 통보(도림천1복개 보수공사)

1. 공사감독1처-7100호(2018.10.10.)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 귀 공단에서 제출한 단면보수 수량 증·감 외 1건에 대한 실정보고에 대하여 아래와 같이 승인하오니 작업 시행후 정산하여 주시고 아울러, 공사 투입전 장비 조정원 및 작업원에 대한 안전교육과 안전장구 착용여부 비산먼지 저감 등 안전사고 예방과 환경관리에 철저를 기하시기  바랍니다.

가. 실정보고 승인사항

실정보고사항	승 인 사 항	비고
기 단면보수부 들뜸구간 단면보수 시행	- 기 단면보수부 들뜸구간 단면보수 시행 - 들뜸구간 두께 확인후 손상 두께에 맞게 단면보수 실시(T=10mm~30mm)
벽체 표면보수 추가 시행	- 우수관로 등 공제 수량에 대하여 완전복개 잔여구간 추가 시행(당초 505m → 540m)

끝.

	서울특별시 남부도로사업소장
주무관	이철형		시설보수과장	10/15 권태선
협조자	주무관	신동헌
시행	시설보수과-4449	(		)	접수		(		)
우	07415	서울특별시 영등포구 도림로 145 서울특별시 남부도로사업소 시설보수과 (대림동)	/
전화	02-3284-5462	/전송	02-836-3093	/	pupil75@seoul.go.kr	/	대시민공개