문서번호	공간정보담당관-9883
결재일자	2018.10.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공간정보기획팀장	공간정보담당관
최지혜		서미연	10/15 최영창
협조

2018년 항공사진 DB구축 및 기능개선 사업 주간업무(10월 3주) 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
공간정보담당관-1154(2018.2.1.)				300,000천원

2018. 10.

공간정보담당관

2018년 항공사진 DB구축 및 기능개선 사업

주간업무(10월3주) 보고

사업명			2018년 항공사진 DB구축 및 기능개선 사업
사업기간			‘18.6.12.~‘18.12.31.	담 당		공간정보담당관 최지혜
사업비			300,000천원	업체/PM		삼아항업㈜ 컨소시엄 마성진 차장
보고기간			‘18.10.8.~‘18.10.12.	전체공정율		계획 59.8% / 실시 59.8%
주요내용			1. 정확도 개선 사진기준점측량(`88년 2차 진행중) 2. 항공사진 발전방향 연구 3. 항공사진 서비스 정확도가 개선된 사진(OrthoPhoto) 제작(`89년1차 진행중) 4. 국정원 보안심사 준비 5. 2018년도 촬영 항공사진 기무사 보안 대상 처리(진행중) 6. 중간보고회 준비
업무구분	이 번 주 실 적 (2018.10.08 ~ 2018.10.12.)				다 음 주 계 획 (2018.10.15 ~ 2018.10.19.)
사업관리	1. 항공사진 발전방향 연구 - 항공사진측량/무인항공사진측량 분야 현황 조사 - 정사영상 제작과정 및 소요비용 조사 - 기존 서울시 항공사진 및 공간데이터 구축현황 및 관리 체계 조사 - 공간정보담당관의 SDW 데이터구조 등 현황 조사 (80%) 2. 촬영이력 DB 검증 - 공정 확인 및 작업자 질의/응답 진행 - 주 단위 분량 인수·인계 *********** *****************				1. 항공사진 발전방향 연구 - 센서(레이저센서, 초분광센서)의 기본특성, 장단점, 활용분야 조사 - 공간정보담당관의 SDW 데이터구조 등 현황 조사 (20%) - 시스템 연계를 위한 공간데이터 Hub 시스템의 요건 2. 촬영이력 DB 검증 - 공정 확인 및 작업자 질의/응답 진행 - 주 단위 분량 인수·인계 ************************* *********** 4. 중간보고회 `18.10.16(화) 10:00 5. 정확도 개선 오류사진 인수·인계 확인 요청
D B 구 축	1. 2018년도 촬영 항공사진 DB구축 [진행중] - 해상도 변경 - 메타데이터 구축 - DB검수 및 수정 - 기무사 보안대상 분석 - 기무사 보안처리(10월22일 완료 예정)				1. 2018년도 촬영 항공사진 DB구축 - 해상도 변경 - 메타데이터 구축 - DB검수 및 수정 - 기무사 보안대상 분석 - 기무사 보안처리
* * * *	************************** ****************************** ************** **********************				********************* ********** ********** *******************
정확도개선	1. 1988년 2차 사진기준점측량 작업중(70%) 2. 1989년 1차 - 정확도가 개선된 사진(OrthoPhoto) 작업중(30%)				1. 1988년 2차 사진기준점측량 작업 2. 1989년 1차 - 정확도가 개선된 사진(OrthoPhoto) 작업
S/W 개 발	1. 개발 적용 - 실서버 적용 후 테스트				1. 개발 적용 사용자 요구사항 수렴 및 보완 예정
이슈사항