문서번호	도시철도설비부-9632
결재일자	2018.10.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정보통신과장	도시철도설비부장
배종수		추경수	10/16 구자훈
협 조

- 지하철 9호선 연장건설(3단계) 정보통신공사 -

제2회 설계변경 자문(소)위원회 개최

2018. 10.

서울지하철 9호선 연장건설(3단계) 정보통신공사

제2회 설계변경 자문위원회(소위원회) 개최

지하철 9호선연장건설(3단계) 정보통신공사 시행 중 현장여건변경, 정거장 안전구역 신설, 철도시설 기술기준 점검항목, 소방검사 지적 등에 따른 설계변경 사항이 발생하여 아래와 같이 설계변경 자문위원회를 개최하고 그 결과에 따라 계약금액을 조정코자 함.

Ⅰ		공사개요

공 사 명 : 서울지하철9호선 연장건설(3단계) 정보통신공사

공사규모 : 본선 10.48km, 8개정거장 정보통신공사

공사기간 : ‘14.12.31 ~‘18.12.30

시 공 사 : ㈜일광기업 (감리단 : ㈜대영유비텍)

계약 및 준공 현황

단위:천원

구 분		총 차	1 차(준공)	2 차(준공)	3 차	4 차
1구간	공사기간	‘14.12.31 ~ ‘18.01.11	‘14.12.31~ ‘15.12.10	‘15.11.23 ~ ‘17.07.31	‘17.02.13 ~ ‘18.12.30
	도급금액	6,557,700	400,000	1,000,000	5,157,700
2구간	공사기간	‘14.12.31 ~ ‘18.01.11	‘14.12.31~ ‘15.12.10	‘15.11.23 ~ ‘16.12.02(준공)	‘16.10.21 ~ ‘17.12.12(준공)	‘18.01.22~ `18.12.30
	도급금액	6,404,534	210,000	735,000	3,594,000	1,865,534

Ⅱ		관련근거

토목부-23475(‘13.12.17)설계변경 자문회의 운영 기준(본부장방침)

현장실정보고

- 서지9-3시감18-079,080호(‘18.02.26) : 정거장 안전구역 세부 추진계획 검토 보고

※ 9호선3단계 정거장 안전구역 설치조성 본부장방침(도시철도건축부-10164/‘17.12.4)

- 서지9-3시감18-182,183호(‘18.04.25) : 물가변동으로인한 계약금액조정(4회)검토 보고

- 서지9-3시감18-228,229호(‘18.06.05) : 특별피난계단 무선통신설비 검토 보고

- 서지9-3시감18-375,376호(‘18.08.30) : 콜폰, 터널비상방송 검토보고

실정보고 승인

- 도시철도설비부-5914(2018.06.25) : 소마미술관 확충공사에 따른 도시철도 시설물 협약변경 체결

- 조달청 예산사업관리과-4283(2018.07.02) : 물가변동으로 인한 총사업비 조정 검토의견서

- 도시철도설비부-6312(2018.07.03) : 실정보고 검토결과 알림

▷  정거장 안전구역, 특별피난계단 무선통신설비설치 등

- 도시철도설비부-8924(2018.09.19) : 실정보고 검토결과 알림

▷  콜폰, 터널비상방송 변경설치 등

Ⅲ		설계변경 자문내용

자문내용

- 설계변경 사유의 적정성

- 단가적용 및 변경물량의 적정성

- 변경되는 공법의 적정성 등

세부 자문내용

번호	내 용	설계변경 자문내용
1	정거장 안전구역 통신설비공사	○ 9호선3단계 “정거장 안전구역 조성계획”에 따른 통신설비 설치 - 9호선3단계 정거장 안전구역 설치조성 본부장방침
2	가. 특별피난계단 음영구역 해소	○ 정거장 특별피난계단에 상시 무선통신서비스를 제공토록 방사형동축케이블 설치 - 국토부(교통안전공단) 실시 “철도시설의 기술기준“ 점검항목 및 지적사항
	나. 930역무실 직통전화 추가	○ 1구간(930~931)역간 직통전화 설비중 930측 직통전화기 누락분 추가
	다. 음성유도기 추가	○ 한국시각장애인연합회 요구에 따른 1구간(933, 934), 2구간( 936, 938)정거장 음성 유도기추가
	라. 환승구간 방송스피커 추가	○ 1구간(933정거장) 환승통로구간 8호선 경계 확정에 따른 스피커 추가분반영
	마. 행선안내설비(TDI) 추가	○ 2구간(935정거장) 대합실(ㄱ자형) 및 936정거장 환승구간 TDI추가
3	가. 콜폰시스템 구성 변경	〮〮○ 정거장 회선부족 문제 해소, 콜폰 가격 인하 및 향후 유지보수 비용 절감을 위한 콜폰 구성 변경
	나. 소방용 무선기 접속 단자 이설	○ 역무실에 설치된 무선기접속단자를 화재수신반으로 이설 - 소방준공검사 기관(송파소방서) 및 소방감리 요청
	다. 터널비상방송 스피커 수량 변경	〮〮○ 터널비상방송 음성품질을 개선을 위한 스피커 수량 추가 - 설치거리축소(50→18m), 스피커 가격 인하 및 전선관 삭감 - 지하철 터널 비상방송설비 구축계획 : 도시철도설비부-6588
	라. 케이블트레이 커버, 소방용 방송스피커 추가	○ 2구간(937정거장) 통신관련 시정사항 보완 요청 반영 ○ 2구간(936정거장)연결통로, 공조실 및 변전실 방송스피커 추가 - 소방준공검사를 위한 소방감리 보완요청(스피커 간격 25M)
4	E/S(4차)	○ 물가변동으로 인한 총사업비 조정(4차) 반영 조달청 검토의견 통보(2018.07.02.)
5	소마미술관 확충공사(통신)	○ 2구간(935정거장) #2출입구(소마미술관 연결통로) 통신설비 설치 - 도시철도토목부-6858(2018.06.07)

설계변경 자문요청 금액

- 서울지하철9호선 연장건설(3단계) 1구간 정보통신공사

공 정 별	도 급 금 액			비 고
	당 초	변 경	증 감 액
총 공 사 비	6,557,700,000	6,676,980,000	119,280,000
1) 공사비	6,074,557,000	6,160,400,000	85,843,000
- 재료비	1,311,768,991	1,383,090,268	71,321,277
- 노무비	3,264,879,908	3,423,292,286	158,412,378
- 경 비	762,293,467	613,190,105	-149,103,362
- 간접비 (일반관리비,이윤,가설비)	735,614,634	740,827,341	5,212,707
2) 물가변동(1차)	201,401,000	201,401,000	0
3) 물가변동(2차)	145,778,000	145,778,000	0
4) 물가변동(3차)	135,964,000	137,958,000	0
5) 물가변동(4차)	0	33,437,000	33,437,000

- 서울지하철9호선 연장건설(3단계) 2구간 정보통신공사

공 정 별	도 급 금 액			비 고
	당 초	변 경	증 감 액
총 공 사 비	6,404,534,000	6,448,400,000	43,866,000
1) 공사비	5,987,548,000	5,998,044,000	10,496,000
- 재료비	1,404,549,138	1,464,199,227	59,650,089
- 노무비	3,124,064,805	3,220,647,013	96,582,208
- 경 비	743,443,887	602,099,174	-141,344,713
- 간접비 (일반관리비,이윤,가설비)	715,490,170	711,098,586	-4,391,584
2) 물가변동(1차)	192,936,000	192,936,000	0
3) 물가변동(2차)	120,157,000	120,157,000	0
4) 물가변동(3차)	103,893,000	103,893,000	0
5) 물가변동(4차)	0	33,370,000	33,370,000

Ⅳ		설계변경 자문(소)위원회 개최

일   시  : ′18.  10. 23(화) 14:00

장    소 : 도시철도설비부 회의실

심의내용 : 9호선연장 정거장 안전구역 설치, 철도시설 기술기준 점검에 따른 통신시설물 설치  및 현장시공 여건변경 등에 따른 설계 변경 적정성 여부 심사

Ⅴ		설계변경 자문(소)위원회 구성

통신분야

구 분		소 속 및 직 위	성 명	비 고
위 원 장		정보통신과장	추경수
간 사		정보통신과 방송통신6급	정덕환
자문위원	내부	정보통신과 정보통신 전문관	박규영
		송변전과 시설6급	이재영
	외부	서울메트로9호선운영(주) 개통준비단장	이성계
		에스트래픽(고문)	조덕영
		㈜안세기술 이사	김남환

Ⅵ		행정사항

설계변경 자문(소)위원회 개최 통보

외부자문위원 개최후 자문비 지급 : 450,000원

- 150,000☓ 3명(기본100,000원, 2시간 초과 50,000원)

※ 2017년도 예산편성 기준(2016.7)

따로붙임 : 설계변경 소(본부)위원회 자문요청 각 1부. 끝.