투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	관급자재 납품기한 연기의뢰(보라매공원 테마 물놀이터 조성공사)

우리 사업소에서 추진중인 『보라매공원 테마 물놀이터 조성공사』에 소요되는 관급자재의 납품기한을 아래와 같이 연기하고자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 건    명 : 보라매공원 테마 물놀이터 조성공사 관급자재 구매

2. 관급자재 현황

물품식별번호	품 명	규 격	단 위	수 량	단가 (원)	금액 (원)
22965080	기타놀이기구	2000x280x2500mm ELW-06	대	1	4,100,000	20,500,000
22965082	기타놀이기구	2400x2400x2530mm ELW-14	대	1	7,000,000	7,000,000
22965083	기타놀이기구	1940x114x2150mm ELW-15	대	5	7,300,000	7,300,000
22965085	기타놀이기구	1690x1700x3000mm ELW-19	대	1	5,100,000	5,100,000
23108244	포설형탄성포장재	t50mm FUN-50	㎡	245	95,000	23,275,000
	조달수수료	0.54%				341,140
	합계					63,516,140

3. 납품기한 변경

- 당 초 : 2018.10.30.(포설형탄성포장재), 2018.11.02.(기타놀이기구)

- 변 경 : 2018.11.30.

4. 연기사유 : 본 공사 일정에 맞추어 납품기한 연기

5. 연기사유 귀책소재 : 서울특별시 동부공원녹지사업소

6. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙   임 : 관급자재 납품기한 연기 검토보고 1부.  끝.

	시설과장
주무관	여은솔		시설관리팀장	김영균		시설과장	10/16 진병규
협조자
시행	시설과-2588	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로20길 33 시설과 (신대방동)	/
전화	02-2181-1159	/전송	02-2181-1169	/		/	대시민공개