＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	강서수도사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	공사 실정 보고 승인 회신(양화교교차로~한국정보화진흥원간 송배수관 부설공사)

1. 서울시설공단 공사감독2처-14719(2018.10.05.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 귀 공단에서「양화교교차로~한국정보화진흥원간 송배수관     부설공사」실정 보고한 공항대로상 염창역 부근 아스팔트 포장 절단 공법     변경에 대해 검토 결과를 붙임과 같이 승인하오며, 특히 공사장 안전사고     등 감리 업무에 최선을 다해 추진하여 주시기 바라며,

3. 아울러 공항대로상 포장복구공사를 강서도로사업소에서 시행하는 관계로

‘굴착복구공사 허가조건’ 에 명기된 최소굴착 폭을 1.4m이상으로 시행     하여 콤비네이션 롤러 다짐장비로 다짐될 수 있도록 하여 주시고,

4. 계약된 물량보다 증가되는 물량 등은 현장에서 정확히 검측하여 향후 설계      변경 등에 반영하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 1. 공사현장 실정 보고서 제출에 따른 검토 보고 1부

2. 굴착복구공사 허가조건 1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	손현정		주무관	이연창		시설관리과장	10/16 代문병희
협조자
시행	시설관리과-18936	(		)	접수		(		)
우	08013	서울시 양천구 목동동로 155(신정동)	/
전화	3146-4005	/전송	3146-4039	/	makson204@seoul.go.kr	/	대시민공개