문서번호	교통운영과-17466
결재일자	2018.10.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		교통개선팀장	교통운영과장
차양호		박상구	10/16 강진동
협조
	주무관		박평근

소통개선 사업 예산 배정 검토 보고 (솔샘사거리)

2018. 10. 16

도시교통본부

교통운영과

소통개선 사업 예산 재배정 검토 보고 (솔샘사거리)

사업 시행 부서로부터 사업 추진에 따른 추가예산 요청이 있어 이에 대한 조치 계획을 검토하고 보고 드림

□ 관련 근거

○`18. 8. 3: 교통안전시설 심의(가결)

○`18.10. 5: 사업 예산 재배정

○`18.10.15: 예산 추가 배정 요청(북부도로사업소 기전과-8839)

□ 사업 현황

○ 위치: 솔샘 사거리

○ 내용: 비보호 좌회전을 동시 신호로 변경하여 정체 개선

- 노면표시, 보도 가각정리, 신호기 교체 등

○ 예산: 30,490천원(신호:4,980+토목:25,510)

□ 추가 사업내용

○ 신호제어기 교체 및 음향신호기 설치

- 기존 제어기 노후 교체(2001년 설치)

- 시각 장애인용 음향신호기 설치(4대 추가 설치)

○ 소요 예산: 19,444천원

□ 조치 방안

○ 집행잔액 활용 예산 재배정

- 금년도 집행잔액을 활용하여 사업구간에 포함된 제어기 교체 및 음향신호기 추가 설치는 금번 사업시행시 정비하는 것이 타당한 것으로 판단됨.

○ 추가배정 (안)                                                   (단위: 원)

배정 부서	당 초	변 경	증 감	비 고
북부도로사업소 (기전과)	4,980,000	24,424,000	증19,444,000	제어기, 음향신호기 등
성북구청 (교통행정과)	25,510,000	0		토목 공사

○ 예 산 과 목: 도시교통체계및소통개선, 교통안전시설물관리, 도로교통소통개선,  시설비 및 부대비, 시설비

붙임  관련 공문 각 1부. 끝.