투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	준공기한 연기 의뢰(2018년 지방폐교 활용 가족자연체험시설 조성 지하수 공사)

1. 시설과-2595(2018.10.16)호의 관련입니다.

2. 우리사업소에서 추진 중인「2018년 지방폐교 활용 가족자연체험시설 조성 지하수 공사」에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2018년 지방폐교 활용 가족자연체험시설 조성 지하수 공사

나. 공사기간 : 2018. 8. 23. ~ 10. 21.

다. 도급금액 : 14,440,000원

라. 도 급 자 : 진주지하수 대표 강영구

마. 준공기한 연기

- 당 초 : 2018. 8. 23. ~ 10. 21.

- 변 경 : 2018. 8. 23. ~ 10. 31. (10일 연장)

바. 연기사유 : 지하수 수질건사 신청에 따른 결과 수령 기간 고려한 공사 기간 연장

사. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙  임 :  준공기한연기검토 보고 1부. 끝.

	시설과장
주무관	최종성		공원조성팀장	송복식		시설과장	10/16 진병규
협조자
시행	시설과-2596	(		)	접수		(		)
우	07062	서울 동작구 여의대방로20길 33 동부공원녹지사업소 시설과	/
전화	02-2181-1157	/전송	02-2181-1169	/	jongsung79@seoul.go.kr	/	대시민공개