문서번호	도시활성화과-11541
결재일자	2018.10.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도시활성화사업팀장	도시활성화과장
이시우		한정무	전결 10/16 윤호중
협조

「공항시장 개발구상 및 수요 분석 용역」

준공기한 연기 검토 보고

2018.  10.

도시활성화과

「공항시장 개발구상 및 수요분석 용역」

준공기한 연기 보고

「공항시장 개발구상 및 수요 분석 용역」과 관련하여 보다 내실있는 용역결과 도출을 위해 아래 내용과 같이 용역기간을 연장하고자 함.

□ 용역개요

❍ 용 역 명:「공항시장 개발구상 및 수요 분석 용역」

❍ 용 역 사: ㈜디안 대표 안근철

❍ 용역기간: 2018.8.29 ~ 2018.10.18

❍ 계약금액: 15,675 천 원

❍ 주요내용

- 공항시장 개발여건 분석

- 부지개발 기본구상

- 개발구상 제안

□ 추진현황

❍ `18. 8.29: 용역계약

❍ `18. 9. 5: 착수보고

❍ `18.10. 8: 공정회의

□ 용역기간 변경

❍ 용역기한 변경 내용

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
용역기간	’18.8.30~’18.10.18	’18.8.30~’18.11.18	1개월 연장
용 역 비	15,675 천 원		변경 없음
용역업체	㈜디안		변경 없음

❍ 용역기한 연장사유

- 용역을 보완하여 내실있는 용역결과 도출을 위하여 용역기간 1개월 연장 하고자 함.

□ 향후계획: 재무과에 용역계약 변경(연장) 의뢰

따로붙임  1. 준공기한 연기의뢰서 1부.

2. 관련공문, 합의각서 및 예정공정표 각 1부.  끝.