문서번호	정보시스템담당관-13345
결재일자	2018.10.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		인공지능팀장	정보시스템담당관
이운심		송종선	10/17 우정숙
협조

행정포털 서비스 이관 및 ActiveX 교체 사업

주간업무 현황보고(6~8주차)

2018. 10.

정보시스템담당관

행정포털 서비스 이관 및 ActiveX 교체 사업

주간업무 현황보고(6~8주차)

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 행정포털 서비스 이관 및 ActiveX 교체 사업

○ 사업기간 : 2018. 8.13. ~ 12.31.

○ 사 업 자 : ㈜에이티앤에스

□ 주간 보고 내역

○ 추진기간 : 2018. 9.21. ~ 10.11.(6~8주차/전체19주)

○ 추진실적

번호	작업구분명	단계	진척율
			계획	실적
1	프로젝트 관리	착수/실행 및 통제	*****	*****
2	행정포털 서비스 이관	시뮬레이션 환경 구축/영향도 분석 /신규서버 구축	******	******
3	ActiveX 교체	기본설계/상세설계	*****	*****
4	합계		******	******

- 프로젝트 관리

▸PL 교체 투입 : 10.4(목)

- 행정포털 서비스 이관

▸TO-BE 시뮬레이션 설치

▸영향도 분석 조치 계획 수립(진행중)

▸전자정부 프레임워크 적용 수행(진행중)

▸신규 서버에 위키 설치 작업

- ActiveX 교체

▸요구사항정의서 작성

▸사용자 화면 정의서 작성

○ 향후 계획

- PL 교체에 따른 일정지연이 발생하였고, 일정상 신규 서버에 설치 등 49.59%가 진행되어야 하나 현재 21.05%로 막대한 일정지연이 발생하여 이에 따른 대응방안(추가 인력 투입 등)을 계획

붙임 : 1. 주간업무 현황 보고서 3부.

2. 월간업무 현황 보고서 1부.  끝.