투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시체육시설관리사업소
수신자	운영기획과장
(경유)
제 목	납품기한 연기 요청

1. ******************************************************************************************와 관련입니다.

2. 2018년 잠실종합운동장 녹지대 정비공사 시행 중 관급자재에 대한 납품연기 사유가 발생하여 아래와 같이 납품기한 연기를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 요청사항 (납품기한 연장)

******	***	**	***** (******)	납품기한
				변경전	변경후
****************	******** *****	***	*********	11.12.	2018. 11.26.
****************	**** *****	****	*********	10.21.
****************	********** ***	******	**********	10.21.
****************	***** *****	****	*********	11.19.
****************	******** *****	****	*******	10.21.

나. 기한 연장 사유 : 본 공사 준공기한이 2018년11월26일로 사전 공정 등이 완료되지 않아 본 공사 준공일까지 납품기한 연기.

붙  임 :  방침서 1부.  끝.

	시설개선과장
주무관	안현미		주무관	이영교		시설개선과장	10/17 정경수
협조자
시행	시설개선과-8696	(		)	접수		(		)
우	05500	서울특별시 송파구 올림픽로 25 잠실종합운동장	/
전화	2240-8791	/전송	2240-8777	/	ahmland@seoul.go.kr	/	부분공개(5,7)