문서번호	설비부-14200
결재일자	2018.10.17.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
박병환		임병국	10/17 권오식
협조

『시립노원청소년 직업체험센터 신축 전기공사』

관급자재 납품기한 연장 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 10.

도시기반시설본부

[설 비 부]

『시립노원청소년 직업체험센터 신축 전기공사』

관급자재 납품기한 연장 검토 보고

『시립노원청소년 직업체험센터 신축 전기공사』와 관련, 건설사업관리기술자로부터 관급자재 납품기한 연장 요청이 있어 검토하고 보고 드림.

□ 공사개요

○ 사 업 명: 시립노원청소년 직업체험센터 신축 전기공사

○ 공사위치: 노원구 노원로 16길 6-21(혜성여고 인접부지)

○ 공사규모: 지하1층/지상3층(연면적 3,229㎡)

○ 주요설비: 수배전설비, 조명설비, 태양광설비, 비상발전설비 등

○ 공사기간: 2017. 11. 10.~2019. 03. 15.

○ 공 사 비: ******

○ 감 리 단: ***********

○ 시 공 사: *****

□ 납품기한 연장 검토내용

○ 관급자재 납품기한 연장 사유

- 건축공정에 맞추 납품기한 연장

○ 관급자재 납품기한 연장 품목

계약번호	계약자	품 명	단위	수량	계약금액(원)	납품 기한		비고
						당 초	변 경
***********	*****	*******	*	*	**********	**********	**********
***********	****	***	*	*	*********	**********	**********

※ 계약금액 변경없음

○ 귀책소재: 도시기반시설본부

○ 지체상금 부과여부: 미부과

□ 감리자 검토 의견

○ 건축 공정상 납품이 불가하므로 건축공정에 맞추어 연장 함이 적정하다고 판단됨.

□ 보고자 의견

○ 건축공정에 맞추어 관급자재 납품기한을 연장하여 공정관리에 만전을 기하고자 하며, 총무부에 관급자재 납품기한 연장을 의뢰 하고자 합니다.

붙임  1. 감리검토 의견서 1부.  끝.