	서울특별시교통방송
수신자	기술국장
(경유)
제 목	변경계약 체결 통보[서울교통공사 지하철 tbs IPTV 이전 재설치 ]

1. 기술국-7283(2018. 10. 16.)호와 관련입니다.

2.「서울교통공사 지하철 tbs IPTV 이전 재설치」건에 대하여 아래와 같이 변경계약체결 결과를 알려드리니 업무추진에 참고하시기 바랍니다.

가. 계 약 명 : 서울교통공사 지하철 tbs IPTV 이전 재설치

나. 계 약 자 : ㈜유성파워텍

다. 변경계약기간 : 2018.10.01.~2018.11.09.

라. 계약금액 : 8,714,300원(팔백칠십일만사천삼백원정)

마. 변경계약사유 : 서울교통공사와 협의 사항 중 천장 해체조립신고 절차변경

	변 경 전	변 경 후
계약기간	2018. 10. 01. ~ 2018. 10. 19.	2018. 10. 01. ~ 2018. 11. 09.

붙임 : 1. 변경계약서 1부

2. 합의각서 1부.  끝.

	기획조정실장
주무관	김혜자		재무팀장	조경제		경영지원부장	이준연		기획조정실장	10/17 남길순
협조자
시행	기획조정실-10788	(		)	접수		(		)
우			/	http://tbs.seoul.kr
전화	02-311-5233	/전송	02-311-5229	/	tt1211@seoul.go.kr	/	대시민공개