문서번호	방재시설부-13308
결재일자	2018.10.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
전문관		환경시설과장	방재시설부장
조양호		장수철	10/17 이임섭
협 조

「중랑물생센터 3차(총인)처리시설 설치사업」

품질관리활동비 반영 검토 보고

2018.10.

도시기반시설본부

(방 재 시 설 부)

「중랑물생센터 3차(총인)처리시설 설치사업」

품질관리활동비 반영 검토보고

『중랑물생센터 3차(총인)처리시설 설치사업』관련 품질관리활동비가 미 반영되어 있어 이에 따른 검토 보고임.

※ 근거 : 중랑감 제18-258호(2018.10.17.)

Ⅰ		사 업 개 요

○ 공 사 명 : 중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업

○ 공사규모 : 총인처리시설 Q=412,000㎥/일

○ 공사기간 : 총괄 2017. 9.13. ~ 2019.11.12.

1차  2017. 9.13. ~ 2018.12.10.

○ 계약금액 : 총괄 16,339백만원(1차 13,336백만원)

○ 시 공 사 : 엘림토건㈜ 외 2

○ 관 리 단 : ㈜천일 외 3

Ⅱ		관 련 규 정

○ 공사계약 일반조건 제19조의 2(설계서의 불분명․누락․오류 및 설계서간의 상호모순 등에 의한 설계변경)

○ 건설기술 진흥법 제56조(품질관리 비용의 계상 및 집행)

○ 건설기술진흥법 시행규칙 제53조 제1항 별표 6(품질관리비의 산출 및 사용기준)

Ⅲ		검 토 내 용

○ 건설기술진흥법시행규칙 제53조 제1항 별표 6(품질관리비의 산출 및 사용기준) 규정에 의하면 품질관리비는 품질시험비와 품질관리활동비로 구분하여 반영토록 되어 있음.

○ 당 현장 설계서의 공통 부대공에 품질시험비는 계획되어 있으나, 품질관리활동비 중 품질관리업무를 수행하는 건설기술자 인건비가 누락되어 있음.

- 품질시험을 하는 시험관리인은 현장에 배치되는 품질관리 업무를 수행하는 기술자 중에서 최하위 등급자로 정하고

○ 품질관리자 인건비는 중급품질관리대상 현장으로 중급품질관리자 1인, 초급품질관리자 1인으로 구성되어 있는 바 단가가 적은 초급품질관리자 적용

○ 공사계약 일반조건 제19조의 2(설계서의 불분명․누락․오류 및 설계서간의 상호모순 등에 의한 설계변경) 규정에 따라 설계서 누락된 품질관리자 인건비 반영이 가능

○ 품질관리자 인건비 적용은 2017년 하반기 건설업 임금실태 조사보고서와 2016년도 엔지니어링업체 임금실태조사 보고서 및 실지급 품질관리기술자 노임단가 중 가장 적은 단가 반영

- 시공사 실지급 단가 : 4,340,000원/월

- 대한건설협회 2017년 하반기 시중노임단가 : 2,827,440원/월(적용)

- 한국엔지니어링협회 2017년도 임금실태조사 노임단가 : 4,283,114원/월

○ 공사비 검토

(단위 : 천원)

구분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
직접공사비	-	67,743	증)67,743
제 경 비	-	18,717	증)18,717
도 급 비	-	86,460	증)86,460

- 품질관리활동비 적용기간 : 2017.09 ~ 2019.11(26개월)

Ⅳ		검 토 의 견

<책임건설사업관리기술자>

○ 검토결과 설계서에 누락된 품질관리자 인건비를 반영하여 원활한 품질관리활동을 통하여 견실시공이 될 수 있도록 실정보고 변경 처리하여 우선 시행토록 하고 차후 설계변경에 반영코자 함.

Ⅴ		조 치 계 획

○ 상기 책임건설사업관리기술자 보고내용을 검토한 바 적정한 것으로 판단되는 바 아래사항을 보완하여 추후 설계변경 처리토록 통보코자 함.

- 낙찰율 80.014% 적용

- 품질관리활동비는 추후 실 정산

붙임  관련 공문 1부.  끝.