문서번호	시설보수과-7757
결재일자	2018.10.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
오광준		10/17 오재섭
협조

현장 실정보고 검토결과 보고

[당현천1복개 구조물외 1개소 보수공사]

2018. 10.

북부도로사업소

(시설보수과)

현장 실정보고 검토결과 보고

[당현천1복개 구조물외 1개소 보수공사]

공사현황

공 사 명 : 당현천1복개 구조물외 1개소 보수공사

규    모 : 아스팔트 덧씌우기 25.8a, 교면방수 2,588.2㎡

단면보수 2,868.6㎡ 등

기    간 : 2018. 4. 20.  ∼  2018. 12 .31.

총사업비 : 967,891,400원

- 도급비 : 942,021,400원

- 관급비 : 15,870,000원

- 이전비 : 10,000,000원

도 급 자 : ㈜건승건설 대표 장승호

근   거 : 현장 실정보고서 제출

[서울시설공단 공사감독2처-15622(2018.10.16.)]

보고내용(보도구간 정비)

보도부 철거시 보도블록 자재에 대하여 30% 신자재 사용 반영

체수발생 억제를 위한 배수구 5개소 추가 설치

기존 보차도경계석은 존치 후 정산

공사개요

- 보도블록 정비 등 : A = 2.8a

- 개략공사비 : (증)25,043천원

조치사항

공단 검토보고 사항에 대하여 승인 처리하고 추후 설계변경시 반영 조치하고자 함.

붙임 : 현장 실정보고서 등 1부.  끝.