내 삶을 바꾸는 서울 10년 혁명
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	계약변경 의뢰(사당천 단면확장 기본 및 실시설계 용역)

1. 우리과에서 계약한 「사당천 단면확장 기본 및 실시설계 용역」에 대하여 설계변경을 아래와 같이 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

○ 용 역 명 : 사당천 단면확장 기본 및 실시설계

○ 계약업체 : ㈜화신엔지니어링 외1개사(㈜동해종합기술공사)

○ 과업내용 : 사당역 일대(동작구 및 서초구)의 침수를 저감시키기 위한 사당천 단면확장을 통한 하천 통수능 증대

나. 변경내용

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	비 고
용역비	357,438	459,274	증101,836
과업기간	‘18.5.14. ~ ‘18.11.9	‘18.5.14. ~ ‘19.2.28

○ 변경사유

- 지장물 조사 및 이설협의에 결과에 따른 단면확장 및 지장물조사 변경물량 반영

- 방배경찰서 구간 단면확장을 위한 지장물 조사 및 관계기관 협의기간 반영

○ 예산과목 : 치수 및 하천관리, 수방대책 사업, 동작구 사당역 일대 배수개선

붙 임 : 1.방침서 및 내역서 1부.

2.합의각서 및 준공기한 연기 의뢰서 1부.끝.

	하천관리과장
주무관	윤희성		청계천관리팀장	민형일		하천관리과장	10/17 손경철
협조자	계약1팀장	조현
시행	하천관리과-14862	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)