투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	설계변경(제1회) 시행- 2018년 도로부속시설물 일상유지보수공사(연간단가)

우리사업소에서 시행중인 『2018년 도로부속시설물 일상유지보수공사(연간단가)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(제1회) 시행코자 합니다.

1. 공 사 명 : 2018년 도로부속시설물 일상유지보수공사(연간단가)

2. 계약기간 : 2018. 03. 09. ~ 2018. 12. 31

3. 계약금액 : 298,382,979원

4. 계 약 자 : (주)동광이엔지 대표 임성은

5. 설계변경내역

(단위 : 원)

공 사 명	당 초	변 경	증 · 감	비 고
도 급 비	298,382,979	351,000,000	증) 52,617,021

6. 설계변경사유 : 해당 사업의 작업완료분에 대한 공종별 수량 증감에 따른 물량변경 및 낙찰차액 사용.

※ 붙임 “설계변경 검토보고서” 참조

7. 예산과목 : 도로관리과, 도로시설물 관리, 도로 및 도로부속물 관리(도시개발), 도로부속시설물 일상유지관리, 시설비 및 부대비, 시설비(401-01)

붙 임 : 1. 설계변경(제1회) 검토보고서 1부.

2. 변경설계서 및 내역서(제1회) 각 1부.

3. 설계변경 검증확인서 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
주무관	권세봉		도로보수과장	강종훈		서부도로사업소장	10/18 이학구
협조자	주무관	이상하		주무관	정동현
시행	도로보수과-9557	(		)	접수		(		)
우	03918	서울특별시 마포구 가양대로 203 서부도로사업소	/	http://www.seoul.go.kr
전화	300-8359	/전송	300-8364	/	se1212@seoul.go.kr	/	부분공개(7)