문서번호	시설보수과-8370
결재일자	2018.10.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	서부도로사업소장
최지락		신동헌	10/18 이학구
협조
	주무관		권순회

-욱천복개2구간 보수공사-

실정보고에 따른 조치계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 10.

서부도로사업소

(시설보수과)

-욱천복개2구간 보수공사-

실정보고에 따른 조치계획 보고

욱천복개2구간 교면포장 실시 후 관급자재 및 폐기물 수량 변동사항에 대한 시공사 실정보고에 따른 조치계획(낙찰차액 사용)을 보고 드림.

※ 관련근거 : 대로건설-18-1017-01호(‘18.10.17.)

□ 공사개요

○ 공 사 명: 욱천복개2구간 보수공사

○ 공사기간: 2018. 5. 25.~2018. 11. 20.

○ 공사개요: 교면포장 10.5a, 상판보수 105㎡, 균열보수 47m, 단면복구 125㎡ 등

○ 도 급 자: 대로건설(주) 대표 김현유

○ 도 급 비: 314,020천원

□ 실정보고 내용

○ 관급자재(아스콘) 및 폐기물 수량 변동

- 정밀안전진단용역(2016.12.)시 코어조사결과 포장부 두께는 약 5㎝로 조사되어 당초 5㎝로 설계하였으나 아스팔트 절삭 공정 후 실측한 포장부 두께가 평균 8㎝(sta.323~358), 6㎝(sta.358~395)로 당초와 상이하여 아스콘 및 폐기물 수량 변동 발생하였으며, 상판보수 추산 물량이 당초보다 줄어 폐콘크리트 발생량 감소

- 변경 수량

구 분		당 초	변 경
관급자재	아스콘	215ton	316ton
폐기물	폐아스콘(절삭)	123ton	290ton
	폐콘크리트	39ton	11ton

※ 발주시 아스콘 수량 126ton에서 실정보고(시설보수과-7087,‘18.9.5.) 사항으로 포장면적이 늘어남에 따라 215t 구매하였음.

○ 아스콘포장 두께 현황

□ 조치계획

○ 아스콘 및 폐기물 증가 수량에 대해 실 계근 수량으로 정산하고, 추가 소요되는 예산은 낙찰차액을 활용하여 아스콘 수량 변경 및 폐기물용역 설계변경을 시행코자 함.

- 소요예산 : 15백만원(도급비 1 관급비 12 이설비 2)

· 포장부 공사 정산 : △1백만원

· 아스콘 101톤 추가 구매 : △12백만원

· 폐아스콘 처리 수량 증가 : △2백만원

- 가용가능예산 현황

(단위:천원)

재배정예산	계약금액	가용가능예산
		계	낙찰차액	집행잔액
357,800	314,020	43,780	43,780	-

○ 또한 낙찰차액 잔여분 28백만원을 활용하여 2018년 정밀점검용역 결과 복개내부 철근노출 등 보수 우선순위 1순위에 대하여 추가 조치코자 함.

붙 임 : 1. 시공사 실정보고 1부.

2. 2018년 정밀점검용역 복개내부 외관망도 1부. 끝.