문서번호	기전과-5020
결재일자	2018.10.18.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
★주무관		기전과장	남부도로사업소장
양상규		임태수	10/18 박기범
협조
	주무관		김용문

『2018년 교통사고 잦은 곳 등 개선 교통신호기공사』

준공기한 연기 검토보고

2018. 10.

남부도로사업소

(기 전 과)

『2018년 교통사고 잦은 곳 등 개선 교통신호기공사』

준공기한 연기 검토보고

“2018년 교통사고 잦은 곳 등 개선 교통신호기공사”와 관련, 서울지방경찰청으로부터 규제 변경 통보가 있어, 아래와 같이 공사기간을 연장하여 공사추진에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관 련 근 거

서울특별시지방경찰청 교통관리과-25524(2018. 10. 17.)

【교통안전시설 개선설치 통보(하달)[신림소방치안센터 앞(관악)]】

㈜태영알앤디 태영(신) 2018-72(2018. 10. 17.)

【2018년 교통사고 잦은 곳 등 개선 교통신호기공사 공기연장 검토 보고】

Ⅱ		공 사 개 요

공  사  명 : 2018년 교통사고 잦은 곳 등 개선 교통신호기공사

공 사 위 치

- 구로디지털단지입구(관악구 시흥대로 554) T-GIS명: 구로디지털단지입구

- 원당초교입구(관악구 남부순환로 1852) T-GIS명: 원당초교입구

- 신림소방치안센터 앞(관악구 봉천동 729-29) T-GIS명: 롯데백화점관악

도  급  비 : 금216,524,087원(금이억일천육백오십이만사천팔십칠원)

공 사 내 용 : 교통사고 잦은 곳 및 중대한 사고 발생지점 시설개선

공 사 기 간 : 2018. 7. 13. ~ 2017. 10. 30.

시 공 업 체 : ㈜진솔이엔지 대표 서창환

감 리 업 체 : ㈜태영알앤디 대표 서태교

설 계 업 체 : ㈜제일엔지니어링종합건축사사무소 대표 임종선, 임은영

Ⅲ		준공기한 연기 검토내용

공사기간 연장 사유

- 서울지방경찰청 규제 변경 : 신호기(차) 추가 신설

당초 공사기간 : 2018. 7. 13 ~ 10. 30.

변경 공사기간 : 2018. 7. 13 ~ 11. 30.

지체상금 부과여부 : 미부과

※ 책임감리원 검토의견

- 서울지방경찰청 변경규제 내용을 반영하기 위해 공사기간을 연장하여 시행하는 것이 적합하다고 판단됨.

Ⅳ		보고자 검토의견

공기연장은 서울지방경찰청 규제 변경 사항을 공사에 반영하여야 하기 위하여 공기연장이 필요하다고 사료됨.

Ⅴ		향 후 계 획

2018. 10. 19. : 준공기간 변경 계약 의뢰(관리단속과)

2018. 11. 30. : 공사준공

붙임 : 1. 책임감리원 기술검토의견서 1부.

2. 서울지방경찰청 관련 공문 1부.  끝.