위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	"광암정수장 정수지 내부방수방식공사(#1,#6) 이의신청“에 대한 결과 통보

1. 정수시설과-5772호(2018.7.12., 재심사요청)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 재심사 요청한 “광암아리수 정수지 내부 방수방식공사(#1,#6)”에 대하여 원가분석자문회의를 개최하고 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

가. 안  건: PE시트라이닝 공법 “STS고정구 수량증가 품” 반영의 재심사 요청

나. 일   시: 2018. 07. 19.(목) 14:00

다. 장   소: 서소문청사 후생동 3층

라. 심의결과: 재심사요청 안건에 대한 일부 수용

- 고정구 개수 증가에 따른 용접공품은 (증) 조정하고 PE시트 부착관련 인력품(방수공,보통인부)은 당초(계약심사)대로 국토교통부 건설신기술품을 적용하는 것이 적정함

마. 심사결과

(단위 : 천원)

사업명	심사요청액 (A)	심사금액 (B)	절감액 (C) = A-B	절감률 (C/A)	비고
광암정수장 정수지 내부방수방식공사(#1,#6)	1,829,652	1,615,526	214,126	11.7	당초
	1,829,652	1,754,555	75,097	4.1	변경

다. 수정사유 : 이의신청에 대한 원가분석자문회의 결과 반영.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	재무과장,서울특별시 광암아리수정수센터소장(정수시설과장)
주무관	조성도		토목심사2팀장	김경근		계약심사과장	07/20 안호
협조자
시행	계약심사과-12098	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서울시청 서소문별관 제1동 9층)	/	http://seoul.go.kr
전화		/전송		/		/	대시민공개