문서번호	설비부-14236
결재일자	2018.10.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
정찬교		代마동훈	10/18 권오식
협조

『남산예장자락 재생사업 전기공사』

실정보고에 대한 검토보고

2018. 10

도시기반시설본부

(설 비 부)

『남산예장자락 재생사업 전기공사』

실정보고에 대한 검토보고

『남산예장자락 재생사업 전기공사』관련, 토목공사 도로 터파기로 인한 임시조명 설치에 관한 실정보고서가 접수되어 검토 보고함.

1		공사개요

□  공 사 명 : 남산예장자락 재생사업 전기공사

□  규 모 : 지하주차장(버스39면, 일반2면) 5,679m2, 부대시설 1,532m2

□  공사기간 : `17.08.01~`19.12.31

□  공 사 비 : *************************************

□  시 공 사 : **************************

□  감 리 사 : ㈜동성엔지니어링

□  공 정 률 : 13%(소방재난본부 리모델링 전기시설물 취부)

2		관련근거

□ 남산예장 감리-335(`18.10.17) : 건설사업관리단 실정보고서 제출

3		실정보고 내용

□  토목 터파기공정에 가로등 저촉되어 임시조명시설 설치

○ 삼일로(남산1호 터널) 도로공사 터파기에 기존 가로등 4본 저촉되어            철거(본 전기공사에 반영 됨)

○ 가로등 철거 후 야간도로 조명 확보하기 위해 임시조명시설 6개 설치

‣ 도로 터파기 범위가 넓어 도로 방호벽 사이에 임시(노출기초, 가공케             이블) 설치

□  주요 변경 내역

공 종	변경내용	변경사유	증·감(천원)
옥외 가로등 설비	·임시등주(H=6m)설치 증)6본 ·등주기초 설치 증)6개 ·투광등기구 LED100w 증)6개 ·전원케이블 3C*2.5sq 증)150m	토목 터파기 공정에 저촉되는 가로등 철거 후 야간도로 조명 확보위해 임시조명설비 설치 필요	증)4,477
제경비(부가세 포함)			증)1,991
도급금액			증)6,468

□  건설사업관리기술자 의견

○ 삼일로(남산1호터널 방향) 도로공사 터파기 공정에 기존 가로등 저촉되어           철거해야 하나, 철거 기간 중 야간도로 조명의 민원이 예상되어 가설 조명시설           설치하고 토목 작업 완료 후 본 가로등 설치함이 타당하다고 판단됨.

4		보고자 의견

□ 건설사업관리 기술자의 실정보고 내용이 타당하므로 실정보고 승인하고,        추후 설계변경 시 내역 반영하고자 함.

붙임 : 감리단 공문 1부. 끝.