문서번호	녹지관리과-4945
결재일자	2018.10.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		녹지관리팀장	녹지관리과장
정주희		김기수	10/19 김윤철
협조

2018년 물순환 생태계류 조성사업 준공기한 연기 검토보고

2018. 10.

중부공원녹지사업소

(녹지관리과)

2018년 물순환 생태계류 조성사업

준공기한 연기 검토보고

『2018년 물순환 생태계류 조성사업』과 관련하여 준공기한을 연기하고자 아래와 같이 보고합니다.

1		사업개요

□ 사 업 명: 2018년 물순환 생태계류 조성사업

□ 위    치: 서울특별시 중구 예장동 산5-6 일대

□ 규    모: 620㎡

□ 사업내용: 계류 및 생태보 조성

○ 식 재 공

- 교목 : 산딸나무 등 2종 30주

- 관목 : 산수국 등 2종 440주

- 초화 : 줄 등 4종 470본

○ 시설물공

- 누수식 생태보 2개소

- 무너비 보 2개소

- 생태소 2개소, 생태소 방수 및 마감 1식

□ 사업기간: 2018. 9. 3. ~ 11. 1.

□ 계약금액: **************************

□ 계 약 자: *******************************

2		준공기한 연기 검토보고

□ 준공기한 연기기간

○ 당   초 : 2018. 11. 1.

○ 변   경 : 2018. 11. 30.

□ 준공기한 연기사유: 현장여건에 따른 추가 공종 발생 등으로
절대공기 부족

※ 추후 설계변경 사항에 대하여 별도 검토보고 예정

□ 연기사유 귀책소재: 중부공원녹지사업소

□ 지체상금 부과여부: 미부과.  끝