투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	교통안전시설 공사기간 연장 알림(세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성 전기공사)

1. 업무지시현장 : 세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성 전기공사 주식회사 정림건축종합건축사사무소, 세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성 전기공사 주식회사 동일전기

2. 작 성 일 자 : 2018-10-19 09:10:04

3. 지 시 내 용

1) 정림역사문화18-761호(2018.10.08)호와 관련입니다.

2) 위호와 관련, 『세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성 전기공사』 시행 중 지장 교통안전시설에 대한 공사기간 연장이 승인되어 알려드리니 기한내 공사가 완료 될 수 있도록 하시기 바랍니다.

- 당초 : 2017. 2. 20. ~ 2018. 10. 30.

- 변경 : 2017. 2. 20. ~ 2018. 12. 20.

- 사유 : 건축공사 공기연장

따로붙임 : 관련공문 1부.  끝.

※ 본 기안은 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시

One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

※ 업무지시전 내용 수정을 원하는 경우 One-PMIS로 반송 후 One-PMIS에서 재작성을 해

주시기 바랍니다.

주무관							곽용길			환경설비과장					10/19 여인웅
협조자
시행			설비부-14309									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층															/			http://infra.seoul.go.kr/
전화		02-3708-8616						/전송			02-3708-8659					/	yong9345@seoul.go.kr												/	대시민공개