문서번호	시설관리과-29510
결재일자	2018.10.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관	주무관		시설관리과장		중부수도사업소장
이승환	代이유찬		허준행		10/19 황일람
협 조

준공기한 연기 보고

(장위동246-173~189호외 6개소 배급수관 정비공사)

2018.10.

중부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

.

준공기한 연기 보고

우리사업소에서 시행중인 『장위동246-173~189호 외 6개소 배급수관 정비공사』가 여름철 폭염 및 추가 작업지시 등으로 절대공기가 부족하여 준공기한을 연기하여 공사시행에 만전을 기하고자 함.

※ 시설관리공단 상수도감독2처-15843(2018.10.18)호 준공기한 연기 검토보고서 제출

Ⅰ				공 사 현 황
		c

□ 공 사 명 : 장위동246-173~189호 외 6개소 배급수관 정비공사

□ 공사기간 : 2018.04.09. ~ 2018.10.25.

□ 공사개요 : D=15~300㎜, L=2,188m  도급비 : ***********원

□ 도 급 자 : *******  대표 : ***

Ⅱ				연기요청 사유
		c

□ 여름철 폭염으로 인한 공사중지 및 강수로 인한 공사연장

○ 지방단체 공사계약일반조건 제8절 2항 계약기간의 연장에 해당하는 사유가 발생

-  제9절 10항에서 규정한 불가항력의 사유에 의한 경우

☞ 지연일수 : 19일(기상청 푝염경보 발령기간중 ‘18.07.23~08.22일중 19일-일요일제외)

☞ 지연일수 : 15일(기상청 5㎜이상 강수로 인한 공사 중지된 기간-일요일제외)

□ 공사 3, 6구간 부단수제수밸브 추가 시공 및 추가구간 발생에 따른 공사연장

○ 지방단체 공사계약일반조건 제8절 2항 계약기간의 연장에 해당하는 사유가 발생

-  발주기관의 책임으로 착공이 지연되거나 시공이 중단되었을 경우

☞ 지연일수 : 5일(3구간 추가공사 및 3,6구간 s-gate밸브 설치에 따른 시공기간 연장 5일)

Ⅲ				변 경 사 항
		c

□ 시설관리공단에서 제출한 준공기한 연기 검토 보고서를 검토한 결과 우천 및 폭염등으로 지연된 39일중 도급사에서 실제 필요한 준공기한은 20일 공기 연장이 적정함.

□ 준공기한 변경

○ 당초 : 2018.04.09. ~ 2018.10.25.

○ 변경 : 2018.04.09. ~ 2018.11.14.(20일간)

Ⅲ				조 치 의 견
		c

□ 여름철 폭염.우천 및 추가공사 선정후 공사시행에 따른 작업지연으로 절대공기가 부족한 실정으로 준공기한을 연기하여 공사시행에 만전을 기함이 가하다고 사료되며,

□ 우리사업소 행정지원과에 변경계약을 의뢰하고, 동하엔지니어링 대표 김윤희 및 서울시시설관리공단에 통보 준공기한 연기 조치하고자 함.

붙임 : 1. 준공기한 연기조치 의뢰서 1부.

2. 준공기한 연기검토 보고(시설관리공단) 1부.

3. 준공기한 연기 요청서(연세공영(주)) 1부.

4. 공정예정표 1부.  끝.