문서번호	교량안전과-18310
결재일자	2018.10.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		교량관리팀장	교량안전과장
정동익		유제천	10/19 김종호
협조

탄천1교 보수공사 설계변경(2회) 보완사항 검토보고

2018. 10.

안전총괄본부

(교량안전과)

탄천1교 보수공사 설계변경(2회) 보완사항 검토보고

본 공사와 관련 건설사업관리단으로부터 설계변경(2회) 보완사항 검토의견서가 제출되어 내용을 검토하고 그 결과를 보고 드림.

관련 근거

❍ 감리18-1054호(‘18.10.18.) 설계변경 보완사항(2회) 검토의견서 제출[탄천1교 보수공사]

공사 개요

❍ 공 사 명 : 탄천1교 보수공사

❍ 공사기간 : 2018.04.11 ~ 2018.10.26

❍ 공사내용 : 보도부 포장1,645,0 ㎡, 빗금도색 : 768,0 ㎡, 표면보수 : 1,316.0 ㎡, 단면보수 : 209.0 ㎡, 차량방호울타리 : 104.0 ㎡

❍ 총공사비 : 763,309천원 (도급비 726,469천원, 관급자재 29,640천원, 이전비 7,200천원)

❍ 시 공 사 : (주)비엘건설

검토내용

❍ 설계변경 근거

- 교량안전과-11353호(‘18. 6.28.) : 실정보고에 대한 검토보고

❍ 설계변경 사유 및 물량 증․감내역

- 방호울타리 간섭에 따른 기존 포장 제거 및 재포설 불가로 차량방호울타리, 가로등 철거 및 재설치하는 실정보고 승인결과 및 계약수량 대비 변경수량 반영

- 물량 증․감내역

공 종	단위	수 량			비 고
		당 초	변 경	증 감
부 대 공
차량방호울타리 철거 및 재설치	m	0	644	644(증)
가로등 케이블 철거 및 재설치	m	0	518	518(증)

❍ 보완사항

- 차량방호울타리 설치 및 철거에 대한 단가를 현장조사 실시(2018.10.16.)하여 반영함.

❍ 산업안전보건관리비 및 환경보전비

공 종	단위	수 량			비 고
		당 초	변 경	증(감)
산업안전 보건관리비	원	11,560,614	5,480,000	(감)6,080,614
환경보건비	원	4,542,467	2,450,000	(감)2,092,467

❍ 공사비 증․감 내역

구 분	공 사 비(단위 : 원)			비 고
	당 초	변 경	증(감)
총공사비	763,309,900	832,178,000	(증) 68,868,100
도 급 비	726,469,900	802,538,000	(증) 76,068,100
관급자재	29,640,000	29,640,000	-
이 전 비	7,200,000	-	(감) 7,200,000

검토의견 및 조치계획

❍ 건설사업관리단으로부터 제출된 설계변경 보완사항(제2회) 검토보고에 대하여 검토한 바 타당한 것으로 판단됨

⇒ 상기내용과 같이 설계변경 시행조치

붙임 1. 실정보고(1회)에 따른 검토보고 1부.

2. 건설사업관리단 설계변경 보완사항(2회) 검토의견서 1부.  끝.