문서번호	시설과-4660
결재일자	2018.10.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관	시설과장		경영지원부장		서울역사박물관장
조은주	박관현		임원빈		10/22 송인호
협 조
	학예연구부장					박현욱
	유물관리과장					한은희
	보존과학과장					양필승
	총무과장					허혜경
	주무관					김명구

- 서울역사박물관 은평수장고 공사 -

현장실정 및 설계변경 보고

2018. 10.

서울역사박물관

(경영지원부 시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

- 서울역사박물관 은평수장고 공사 -

현장실정 및 설계변경 보고

서울기록원내 은평수장고 공사 중 물량 증감 사항에 대해 보고드리고 설계 변경 및 공기 연장(40일) 조치하여 시공 품질 확보와 공정 관리에 만전을 기하고자 함

1		개요 및 추진경과

□ 공사 개요

◦ 공 사 명: 서울역사박물관 은평수장고 공사

◦ 공사기간: 2018. 4. 12. ~ 2018. 11. 5.

(※공사 일시 정지기간: 2018. 8. 5.~2018. 10. 31.포함)

◦ 도 급 자: 우탑건설주식회사(대표 김성현)

◦ 공사(계약)금액 : 금 1,237,547,280원(낙찰률: 86.745%)

◦ 현재 공정률: 21.6%(공사 정지 중)

□ 추진 경과

◦ 2018. 2. 12.  은평수장고 공사 추진계획 방침 수립

◦ 2018. 2. 27.  특정제품선정 심사위원회 개최(의결, 유물관리과)

◦ 2018. 3.  9.  특허제품 및 기술지원 협약 체결 계획 방침 수립

◦ 2018. 3. 20.  공사 계약심사 결과 알림(시 계약심사과)

작 성 자	경영지원부장 임원빈 ☎ 02-724-0105 과장 박관현 ☎ 0130 담당 : 조은주 ☎ 0123

◦ 2018. 3. 28.  공사 계약 의뢰

◦ 2018. 4. 11.  공사 계약 체결(재무과)

◦ 2018. 4. 12.  공사 착공

◦ 2018. 7.  9.  수장대 사양변경 요청(유물관리과→시설과)

◦ 2018. 7. 13. 하도급 통보 및 직불동의서 제출(시공사)

◦ 2018. 7. 13. ‘훈증고’ 집기 변경(추가) 요청(보존과학과)

◦ 2018. 7. 17. 공사중지 및 공기연장 요청(시공사→서울역사박물관)

◦ 2018. 8.  1. 은평수장고 일시 정지 보고 방침 수립

◦ 2018. 8.  3. 은평수장고 준공기한 연기 요청

◦ 2018. 8.  5. 공사 일시 정지

◦ 2018. 8. 13. 공사 변경 계약 체결 통보

◦ 2018. 8. 14. 하도급 계약 변경 통보(시공사)

◦ 2018. 10. 19. 현장실정 보고(시공사→서울역사박물관)

2		현장 실정 보고

□ 주요 변경 내용

(단위: 원)

공 종	규격	단위	당 초	변 경 후	직접공사비 증 감(△)액
수장고 공사	1	식	877,975,857	957,465,073	79,489,216
기타 설비공사	1	식	23,069,269	22,185,031	△884,238
직접 공사비 합계			901,045,126	979,650,104	78,604,978

1) 수장고 공사 내용 변경

◦ 1층 수직 덕트 주변 칸막이 벽체 신설

훈증실용 수직 덕트관이 서울기록원 공간 1층 사무실 내 노출 설치

기록원 측에서 벽체 마감 처리를 요구하여 벽체 설치 및 도장 마감

◦ 수장고 천장 점검구 추가

은평수장고 목가구 및 토도류 수장고내 CCTV 추가(통신공사 별도 발주)

CCTV 배관 점검을 위한 천장 점검구 3개소 추가

◦ 수장대 규격 변경

은평수장고 유물 수장량을 높이기 위해 박물관 수장고에서 은평수장고로 이전하는 유물의 종류 변경, 수량 증가

유물관리과 측에서 「은평수장고 유물 운송 및 격납을 위한 지침」을 수립하여 시설과로 수장대 사양변경 요청(유물관리과-1339, 2018. 7.9.)

2) 기타 설비공사 내용 변경

◦ 덕트 규격 변경

기록원과 은평수장고 덕트배관 형태가 상이하여 기록원과 동일하게 변경 (원형  ∮100 → 사각형 250×250㎜)

덕트 규격 변경으로 배관을 위한 벽체코어 크기 및 수량 등 변경

◦ 배관 위치 및 길이 변경

현장 여건상 설계 도면대로 설치가 어려워 실외기 위치를 변경함에 따라 냉매 배관 감소(∮22: 87m → 47m, ∮9.5: 101m → 61m)

위생배관 코아 크기 및 수량 변경

3) 공기 지연 사유

서울기록원 선행공정 지연 및 작업 간섭 등으로 공사 진행 불가

공사 불가 기간	사 유	일수
2018. 6. 15.~2018. 6. 19.	기록원 바닥 타설로 수장고 출입 통제	5
2018. 7. 5.~2018. 7. 8.	기록원 지하1층 바닥 타설로 수장고 출입 통제	4
2018. 7. 9.~2018. 8. 10.	은평수장고내 기록원 기계설비 공사로 수장고 마감 공사 불가	33
합 계		42

3		설계 변경 내용

□ 법적 근거

○ (지방계약법 시행령 제74조) 설계변경으로 인한 공사량 증감시 계약금액 조정

○ (공사계약 일반조건 제19조) 설계서 누락·오류, 현장 상태 상이, 발주기관의

설계서 변경 필요 인정시 설계 변경

○ (공사계약 일반조건 제 25조 3항) 발주기관의 책임으로 착공이 지연되거나 시공이 중단 된 경우 지체일수 산입 제외

○ (공사계약 일반조건 제 26조 2항) 계약기간 연장 사유 발생시 공사의 적정이행을 위한 계약기간 연장등 필요 조치

□ 변경 내용

○ 공사금액 : 증) 98,622,720원

(단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증감액
공사 금액	1,237,547,280	1,336,170,000	증)98,622,720

- 예산 과목: 서울역사박물관 - 역사와 문화의 복합공간 창조–소장유물확보 및 보존 - 은평수장고 조성–시설비(100-401-01) - 은평수장고 수장 환경 조성 공사비용

○ 공사 기간 : 증) 40일

- (당초) 2018. 4. 12. ~ 2018. 11. 5.

- (변경) 2018. 4. 12. ~ 2018. 12. 15.

(※ 공사 일시 정지: 2018. 8. 5.~2018. 10. 31.)

□ 직접공사비 증감내역

(금액단위: 천원)

구 분	변경 품명 및 규격		직접공사비 증감(△)액		설계변경 사유
	당 초	변경후
벽체공사	-	M-STUD(7㎡),RUNNER(2m),석고판 못붙임, 수성페인트(7㎡)	당초	-	1층 수직 덕트 주변 칸막이 벽체 신설
			변경	337
			증(△)감	337
수장고 출입문 및 잡철	천장점검구(10개소)	천장점검구(13개소)	당초	651	CCTV 추가설치에 따른 점검용
			변경	846
			증(△)감	195
선반식 수장대 이전 재설치	선반식 수장대 해체 및 재설치(81대), 운반비(5ton, 6대)	-	당초	15,614	유물관리과 요청(수장대 규격변경)
			변경	0
			증(△)감	△15,614
고정식→이동식 수장대변경	이동식 유물수장대 (A,B 17대), PLATE 교체(324대)	목재타입선반(B,C)+ PIPE선반SET(32대)	당초	32,274
			변경	5,257
			증(△)감	△27,018
수장대 신규제작 (목가구)	선반식 수장대(A~D, 39대) 이동식 수장대(C~D, 29대)	선반식 수장대 규격변경 (A~D, 13대),이동식 수장대 규격 변경 및 추가 (A~K-1D, 81대), 병풍류 수장대 (1대), 철재서랍장 (1대),철재 선반장(1대)	당초	96,343
			변경	189,182
			증(△)감	92,839
수장대 신규제작 (토도류)	선반식 수장대(E,F 11대) 이동식 수장대(G,F 16대)	선반식 수장대 규격 변경 (E,F 6대), 이동식 유물 수장대 (L~O, 31대)	당초	45,573
			변경	74,323
			증(△)감	28,750
환기덕트설치공사	기계식 닥트 제작설치(52.8㎡) 강관용접(D100 17개소), 코아드릴 바닥, 벽체(D100 6개소), 닥트슬리브 코어(0.26㎡)	기계식 닥트 제작설치(94㎡),덕트공 (9.37 M/D),FLEXIBLE DUCT (20m),400×200(FD 4EA), 250× 250(FD 6EA, BDD 1EA), 슬리브(0.54㎡)	당초	5,756	덕트 규격 및 수량 변경
			변경	7,209
			증(△)감	1,454
위생배관공사	STS관(1개소),STS관 용접 (D15 21개소, D20 14개소, D25 3개소), 코아 드릴 벽체(D80 4개소)	STS PIPE(D13 12m, D20 6m), 노무비 배관공(0.78M/D), 코아 드릴 벽체(D50 4개소, D100 3개소)코아 드릴 바닥(D100 2개소)	당초	2,035	배관 위치 및 길이 변경
			변경	1,750
			증(△)감	△285
냉난방기설치공사	동파이프 22.22(87m), 동파이프 9.52(101m), 고무발포보온재 19T(101m)	동파이프 22.22(47m), 동파이프 9.52(61m), 고무발포보온재 19T(61m)	당초	11,652	실외기 위치변경
			변경	9,599
			증(△)감	△2,053
직접 공사비 소계			당초	209,898
			변경	288,503
			증(△)감	78,605

※ 법정 경비는 준공시 정산 조치

4		검토 의견

○ 박물관 유물의 원활한 이전, 은평 수장고 수장 환경 확보 및 공사품질 제고를 위해 상기 내용과 같이 설계변경 추진하고자 함

○ 서울기록원 공정 지연과 발주처 설계 변경 요구 등으로 42일의 공기 지연이 발생하였으나, 준공 검사 및 예산 집행 일정 등을 고려하여 공사 기간을 40일 연장하여 2018년 12월 15일 준공하고자 함

붙임  실정보고 및 공기연장 신청 공문 1부.  끝.