내 삶을 바꾸는 서울 10년 혁명
	서울특별시
수신	도봉구청장(문화체육과장)
(경유)
제목	‘원통사 호우피해 긴급보수 지원’ 사업계획 변경 승인 통보

1. 도봉구 문화체육과-29161(2018.10.12.)호와 관련입니다.

2. 귀 구에서 요청한 ‘원통사 호우피해 긴급보수 지원’ 사업의 계획변경을 다음과 같이 승인하오니 사업추진에 만전을 기해 주시기 바랍니다.

○ 승인내역

구분	변경내역		비고
	당초	변경
공사범위	① 종각이전 및 축대보수	① 종각이전 및 축대보수 ② 붕괴 산사면 보강 및 우수처리 공사 ③ 파손 소방물탱크 교체 ④ 공사감독용 CCTV 설치	8월말 집중호우로 인한 산사면 붕괴
소요예산	806,376천원	884,700천원	78,324천원 증가

끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	이승헌		종무팀장	김남수		문화정책과장	전결 10/22 서영관
협조자
시행	문화정책과-12767	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/
전화	02-2133-2522	/전송	02-2133-1059	/	silki1231@seoul.go.kr	/	대시민공개