문서번호	아동청년과-12785
결재일자	2018.10.22.
공개여부	비공개(5)
방침번호

주무관		청년청소년팀장		아동청년과장		주민생활국장
김명선		강은진		정은숙		10/22 김인영
협조

★ ◉

성동청소년문화의집 LED조명 교체 계획

2018. 10.

【아동청년과】

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 [√] 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 [√] 공약(약속)사업 [ ] 계속사업 [ ] 인센티브/공모사업 [ ]
소통·갈등분야 고려사항		●	구민			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	전문가			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	이해당사자			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	갈등발생요인			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	갈등 예방/해소 대책			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
여성친화 도시		성평등 [ ] 안전·편의 [√] 가족·공동체회복 [ ] 여성참여 [ ]
아동친화 도시		아동권리 보장(생존권·보호권·발달권·참여권) [ ] 아동 의견수렴 및 반영 [ ]
기타 고려사항		일자리 [√] 환경영향 [ ] 안전 [ ] 유지비용 [ ] 바른 공공언어 [ ]
		성인지 [ ] 취약계층 [ ] 장애인 [ ] 디자인 [ ] 공직선거법 [ ]
타자원 활용		●	중앙부처	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	서울시	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	기업	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	민간단체	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
언론홍보 계획		기획보도 [ ] 보도자료 [ ] SDTV [ ] 뉴스레터 [ ] 성동구소식지 [ ]
		기고문 [ ] 전자행정서비스 [ ] SNS [ ] 기타(리플릿 등) [ ] 없음 [ ]
	● 홍 보 제 목 :
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

성동청소년문화의집 LED조명 교체 계획

청소년들이 많이 이용하는 ‘성동청소년문화의집’의 노후한 전등을 교체하여

시설 내부환경을 개선하고, 에너지의 효율적 이용 및 온실가스 배출

저감에 기여하고자 함

Ⅰ		추 진 근 거

□ 성동구 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 제13조(운영지원)

□ 공공기관 에너지 이용 합리화 추진에 관한 규정(산업통상자원부)

Ⅱ		추 진 방 향

□ 청소년시설 내부 조도 환경을 개선하여 환경 개선에 기여

□「고효율에너지기자재 인증서」를 획득한 LED조명 교체로

에너지 사용량 및 유지보수 관리비 절감

Ⅲ		시 설 현 황

□ 시 설 명: 성동청소년문화의집(성동구 장터1길 18)

□ 규    모: 연면적 1,395㎡, 토지 894.94㎡

□ 주요시설: 독서실, 진로체험센터, 대안학교, 강당, 식당 등

층 별	면적(㎡)	사 용 용 도
지상3층	393.27	강당, 노래방, 체력단련실, 샤워실, 교육실2, VIP교실
지상2층	393.27	성동구청소년진로체험센터, 관장실
지상1층	388.47	독서실, 사무실, 더하기교실, 교육실1, 화장실
지하1층	219.99	5락실(PC, 도서, 식당, 플레이스테이션 등), 안내실 등

Ⅳ		세부 추진계획

□ 공사기간: 2018. 10. 23. ∼ 10. 31.

□ 공사규모: 시설(지하 1층∼지상 3층) 조명 256등

□ 공사내용

○ 기존 전등을 고효율 LED조명으로 교체

○ 매입등 239개(직사각형 96개/ 원통형 143개), 직부등 17개

구분	기 존	교 체
LED 매입등
LED 매입등 원통형
LED 직부등

□ 공사방법: 수의계약

○「지방계약법 시행령」제25조(수의계약) 제1항 제5호

□ 추진일정

○ 2018. 10. 23.∼10. 25.  계약체결

○ 2018. 10. 26.∼10. 31.  LED조명 설치 및 준공

Ⅴ		소 요 예 산

□ 예 산 액: 10,000천 원(구비)

□ 교체내역: ‘붙임내역’ 참조

□ 예산과목: 아동청년과, 청소년 보호 및 육성, 청소년활동 지원,

구립청소년문화의집운영, 시설비 및 부대비, 시설비(401-01)

붙 임 성동청소년문화의집 LED조명 교체 내역 1부.  끝.