투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	관리과장
(경유)
제목	준공기한 연기요청(중랑물재생센터 3처리장 침전지 정밀안전진단 용역)

1. 우리 센터에서 시행하고 있는 『중랑물재생센터 3처리장 침전지 정밀안전진단 용역』 건에     대하여 아래와 같은 사유로 준공기한을 연기하고자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역현황

- 용 역 명 : 중랑물재생센터 3처리장 침전지 정밀안전진단 용역

******************************

- 용역기간 : 2018. 05. 04.~ 2018. 10. 30.

-********************

나. 준공기한

- 당 초 :  2018. 05. 04.~ 2018. 10. 30.

- 당 초 :  2018. 05. 04.~ 2018. 11. 30.

다. 연기사유 : 침전지 내 물비우기 일정에 따른 점검으로 인한  절대공기 부족

라. 지체상금 : 미부과

따로붙임 : 준공기한 연기 방침서 및  합의서 1부.  끝.

	시설보수과장
주무관	이생기		시설보수과장	10/22 윤승범
협조자	주무관	이석근
시행	시설보수과-5760	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 중랑물재생센터	/	www.seoul.go.kr
전화	02)2211-25761	/전송	02)2211-2579	/		/	부분공개(6)