문서번호	토목부-18031
결재일자	2018.10.23.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

		시 민
주무관	도시고속도로과장	토목부장
남덕희	명경출	10/23 김영수

공정계획 변경 시행 검토 보고

(노들섬특화공간 조성 토목공사)

2018. 10.

도시기반시설본부

(토 목 부)

공정계획 변경 시행 검토보고

(노들섬특화공간조성 토목공사)

본 공사 부지내 ******** 협의(공공재생과 추진) 지연으로 당초 공정이 늦어지게 되어 이를 만회하기 위한 대책을 보고드림.

공사개요

○ 위    치 : 용산구 이촌동 302-6일대

○ 사업규모 : 옹벽보수공사, 보도육교설치, 우수관 및 오수관 설치

○ 사업기간 : 2017.11.15. ~ 2019. 4.27.

○ 계약금액 : 6,099백만원

○ 시공업체 : 신성종합건설(주) 외 2

○ 공 정 율 : 계획 82.16/실행 69.77, 공정율 84.92%

추진 경위

○ 2017.11.15. : 공사착수

○ 2018.9.20. : ************************************

○ 2018.10.11. : 노들섬 동측 건물 철거완료

현  황

○ 공정지연사유

- 동측부지 ******* 철거 협의 및 지장물(한전, 통신케이블) 이설 협의 지연

○ 노들섬 우수관로 흄관설치 및 되메우기 작업중

○ ********에 따라 12월초까지 한전케이블 이설작업(설비부)

검  토

∎ 건축공사와 간섭공정으로 공기를 정상으로 회복(2018.10.30.부터 공정율 97%이상)하기 위하여 공정계획 변경 검토

○ ****************************************************** 토목공사인 흙막이가시설, 구조물터파기, 보행육교 교각, 보행육교 제작 및 거치작업이 정상추진되지 못함

조치계획

○ 정상적인 공정추진을 위하여 공정계획 변경

○ 공정별 작업 적극 시행

- 흙막이가시설: 지장물(한전고압선)이설 작업기간 변경 시행

(당초: `18.8.1∼`18.10.14,  변경: `18.12.1∼`19.3.20)

- 구조물터파기: 건축 PHC PILE 공사 종료 후 작업 시행

(당초: `19.1.1∼`19.2.28, 변경: `18.12.1∼`19.1.31)

- 보행육교 교각: 지장물이설 즉시 작업 진행

(당초: `18.8.1∼`18.9.31, 변경: `19.1.1∼`19.1.31)

- 보행육교 제작 및 거치: 동측 건축골조공사 후 거치

(당초: `18.6.1∼`18.12.31, 변경: `18.6.1∼`19.4.23)

붙 임 : 감리단 검토의견서 1부.  끝.