문서번호	기전과-5084
결재일자	2018.10.23.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
김해중		임태수	10/23 박기범
협조
	주무관		김현태

난곡터널 조명개선공사(상행)

설계변경 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 10.

남부도로사업소

(기  전  과)

난곡터널 조명개선공사(상행)

설계변경 검토보고

『난곡터널 조명개선공사(상행)』와 관련하여, 공사업체로부터 시공물량 변경 등 설계변경 요청이 있어 아래와 같이 검토하고 보고드림.

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 난곡터널 조명개선공사(상행)

○ 공사개요

- 터널등 철거 나트륨250W×263등

- LED터널등 설치 220등

- 케이블 및 케이블트레이 교체 1식

○ 도 급 액 : *************

○ 공사기간 : 2018. 8. 27 〜 2018. 11. 24

○ 도 급 자 : 정안전기*********

□ 주요 설계변경 사항

공 종	변경전	변경후	변경사유	증․감액 (천원)	비고
터널등 설치	- LED 220등	- LED 224등	실제 시공물량 증가 (터널:360m→375m)	증235
케이블 철거설치	- 케이블CV16.0㎟/1C, 일반, 4열동시 880m(야간)	- 케이블CV16.0㎟/1C, 일반, 4열동시 780m (주간) 반영	실제 시공물량 정산	감548
	- 케이블CV10.0㎟/1C, 일반, 4열동시 8,353m (야간)	- 케이블CV10.0㎟/1C, 일반, 4열동시 5,128m(주간)반영	실제 시공물량 정산	감9,452
	- F-CV 10.0㎟ × 1C*2열 5,920m	- F-CV 10.0㎟ × 1C*2열 6,352m	실제 시공물량 정산	증344

공 종	변경전	변경후	변경사유	증․감액 (천원)	비고
케이블 철거	- 접지선 철거 설치 740m 야간)	- 접지선 철거 설치 794m(주간) 반영	실제 시공물량 증가 (터널:360m→375m)	증155
케이블 트레이 지지금구	- 지지금구 240개 설치	- 지지금구 250개 설치 반영	실제 시공물량 증가 (터널:360m→375m)	증137
트레이 철거설치	- 트레이 철거 설치 360m	- 트레이 철거 설치 375m	실제 시공물량 증가 (터널:360m→375m)	증1,234
트레이 커버	- 트레이커버 철거 설치(미반영)	- 트레이커버 철거 설치 750m반영 (재사용)	공종 누락	증16,622
고재	1,510kg	- 1,024kg	케이블 및 트레이 철거 물량 반영	증435

○ 설계변경 증․감액

구분	변경 전	변경 후	증․감	비고
도급비	************	************	************

○ 설계변경(증액)으로 인한 부족액 조달방안

- 설계변경으로 증가된 금액은 낙찰차액을 활용하여 처리하고자 함.

구분	발주 금액	낙찰 금액	낙찰차액	비고
도급비	************	************	***********

- 예산과목 : 도로시설물관리, 터널시설관리, 난곡터널보수, 시설비 및 부대비, 시설비.

□ 보고자 검토의견

○ 당초 설계시 터널길이를 360m로 설계하였으나 실측결과 375m로 물량이 증가 하였으며,

※ 시설보수과 난곡터널 방음벽 설치공사도 375m로 설계

○ 또한, 자체 설계과정에서 누락된 공종(트레이커버 철거 설치)을 현장에 맞게 반영함이 타당하다고 사료되며.

○ 실제 시공에 따른 물량조정 내역을 반영하여 설계변경 시행코자 함.

□ 향후계획

○ 2018. 10. 23.	계약변경의뢰(기전과→관리단속과)

○ 2018. 11.	공사 준공

붙임 : 1. 설계변경내역서 및 검증확인서 1부.

2. 보험완납증명서 및 안전관리비 사용내역서 1부.

3. 합의각서 1부

4 공사업체 설계변경 제출 공문 1부.  끝.