문서번호	시설과-6487
결재일자	2018.10.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
김학석		조대복	10/23 오임석
협 조
	전략기획실장			유연호
	총무과장			이행용

대동물관 코끼리 샤워시설 설치 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 10.

서울대공원

(시설과)

대동물관 코끼리 샤워시설 설치 검토 보고

대동물관 내 코끼리 샤워용 온수보일러 추가 설치 요청이 있어  현장 점검 후 검토사항을 보고 드림.

□ 추진배경

❍ 동절기 외기 온도저하에 따른 코끼리의 샤워 및 물놀이 등을 위한 온수시설이 없어 동물생육환경에 조성에 지장을 초래함

❍ 최근 추진중인 AZA 인증을 위해 동물복지강화 일완으로 시설보수가 요구되며 동절기 동물의 샤워 및 내실 청결(물청소)에 대한 요구가 증대함

※ 대동물관 온수기 구매 및 설치 요청{동물복지2과-3737(2018.10.01.)}

□ 점검개요

❍ 점검일시 : 2018.10.05.

❍ 점 검 자 : 기계화공팀 백강석, 김학석 주무관 및 기계반장

❍ 점검내용 : 대동물관 온수시설에 대한 현장 조사

- 기존 온수시설 현황 및 사용 실태

- 코끼리의 샤워등 필요온수 용량 및 온도

- 기타 동절기 급수시설 현황

□ 점검결과 및 조치계획

❍ 점검결과

시설명	점검결과	조치계획
온수시설	기존 온수보일러 200ℓ 2대 설치되어 사육사 샤워용으로 사용함 ▶ 수량부족	코끼리 샤워전용 온수보일러 별도 설치 용 량 : 1,000ℓ 설치위치 : 내실 계단 하부
급수시설	버팔로사 야외방사장 급수시설 개선 요함 ▶기존 노출배관으로 동절기 단수 조치됨	기계실과 연계된 버팔로사 전용 급수시설 설치

❍ 현황사진

대동물관 기존 온수보일러	코끼리 샤워용 온수보일러 설치 장소	버팔로사 급수시설

□ 조치방안

❍ 시행방법 및 소요예산

보수내용	내 용	소요예산
코끼리 샤워전용 온수보일러 설치 버팔로사 전용 급수시설 설치	전문업체에 조치	18,000천원

※ 서울대공원 공사 경험이 있는 기계설비 전문업체에 수의계약 시행

- 대상업체 : ㈜동하건설 대표 김덕봉

❍ 예산과목

- 서울대공원, 공원이용시민만족도향상, 동물사관리기능 및 야생동물종보존, 공원안전시설보수 및 정비, 시설비(동물사 노후설비 개선사업)

❍ 추진일정

- 내역서 작성 및 수의계약 추진 ……………… 10월31일.

- 계약 및 공사시행 ……………………………… 11월25일.

- 공사 완료 및 시험운영 ………………………  11월30일.  끝.