문서번호	교량안전과-18444
결재일자	2018.10.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		특수교량팀장	교량안전과장
임승민		정준용	10/23 代박동욱
협조

[동호대교 보수공사]

준공기한 연기 요청 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 10

교량안전과

(특수교량팀)

[동호대교 보수공사]

준공기한 연기 요청 검토 보고

우리과에서 현재 시행중인 『동호대교 보수공사』에 대한

감리단의 준공기한 연기요청이 있어 이에 대한 검토 보고임.

Ⅰ		관 련 근 거

□ 동성한강 2018-394호(2018.10.22.) 준공기한 연기 요청

Ⅱ		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 동호대교 보수공사

□ 공사내용 : 교면포장 47.9a, 보도부포장 994㎡, 상판보수 101㎡                난간보수 120m, 강관비계 600㎡ 설치 등

□ 공사기간 : 2018.05.08 ~ 2018.11.03

□ 도 급 사 : (주) 남경씨엔아이

□ 도 급 액 : 859,907천원

□ 감 리 사 : ㈜동성엔지니어링 외 1

Ⅲ		준공기한 연기 요청 및 검토

□ 감리단 연기 요청

당 초	변 경	비 고
2018.05.08∼2018.11.03	2018.05.08∼2018.11.30	27일 연기

□ 연기 요청 사유

- 동호대교 본선 신축이음 하부 배수받이 6개소 설치 신규공종 발생에 따른 절대 공기 부족(자재발주 15일＋ 현장시공 12일)

□ 검토 결과

- 기 실정보고 승인 사항(교량안전과-17844, 2018.10.12.)인

동호대교 상⸱하류교 6개소(P7,P10,P13) 신축이음 하부 배수받이 설치 추가공정 발생에 따른 공사기간이 필요한 사항으로 감리단 검토 의견이 적정한 것으로 판단됨.

※ 당초 : 2018.05.08 ~ 2018.11.03

변경 : 2018.05.08 ~ 2018.11.30.(27일 연기)

□ 지체상금 부과 : 미부과

Ⅳ		행 정 사 항

□ 감리단에 준공기한 연기 실정보고 승인 통보

□ 재무과에 준공기한 연기 계약 의뢰

붙임 : 감리단 준공기한 연장 요청 1부.  끝.