문서번호	문화정책과-12831
결재일자	2018.10.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시민문화팀장	문화정책과장
이진희	이선경	10/23 서영관

- 2018 문화가 흐르는 서울광장 대행 용역 -

계약기간 변경계획

2018. 10.

문화정책과

문화가 흐르는 서울광장 용역 계약기간 변경계획

「2018 문화가 흐르는 서울광장」대행 용역의 원활한 추진을 위해 준공기한을 연기하여 변경계약을 체결하고자 함

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2018 문화가 흐르는 서울광장 대행 용역

○ 용역업체 : ㈜아트카오스

○ 과업기간 : 2018. 3. 8. ~ 10. 31.

○ 소요예산 : 금984,577,000원(금구억팔천사백오십칠만칠천원)

○ 과업내용 : 공연 프로그램 기획·운영, 특설무대 설치·관리 등

□ 용역계약 변경

○ 계약기간 연장

구 분	변경 전	변경 후	비 고
계약기간	2018. 3. 8. ~ 2018. 10. 31.	2018. 3. 8. ~ 2018. 11. 30.	1개월 연장
계약금액	984,577천원	984,577천원	변동없음

○ 연장사유

- 공연기간이 당초 9월말까지에서 10월말까지로 연장됨에 따라 정산 및 사업결과 정리에 추가적인 기간 소요

- 11월초 무대 대관이 예정되어 있어 무대 설치기간 연장 및 무대 철거기간 확보를 위하여 계약기간 연장이 필요함

○ 연기사유 귀책소재 : 서울시와 용역수행자 합의에 의함

○ 지체상금 부과여부 : 해당없음

□ 행정사항

○ 변경계약 체결 의뢰(→ 재무과)   : ’18. 10. 23.

□ 향후일정

○ 변경계약 체결                   : ’18. 10월중

○ 문화가 흐르는 서울광장 운영     : ~ ’18. 10월말

○ 서울광장 특설무대 철거          : ’18. 11월중

○ 정산 및 결과보고                : ’18. 11월말.  끝.