-강일고등학교 외 10개소 아리수 음수대 배관 설치 공사-

설계변경 심의 의견서

부분공개(5)

공사명: 강일고등학교 외 10개소 아리수 음수대 배관 설치 공사

신청 부서명	강동수도사업소 시설관리과
공사 감독원	지방시설서기 백창진
제출 년월일	2018. 10. 23.(화)

심의 위원회 의견

○ 심의 일시: 2018. 10. 23.(화) 14:00

○ 심의 의견: 설계변경에 따른 심의 결과에 대해 아래와 같이 의견 제시함.

위   원

직  위

성  명

서  명

의  견

위 원 장

시설관리과장

김태형

10/24

김태형

타당함

위    원

담당주사

송종범

송종범

타당함

위    원

주무관

임인택

임인택

타당함

위    원

주무관

한호진

한호진

타당함

위    원

주무관

송종학

송종학

타당함

위    원

주무관

이영동

이영동

타당함

담    당

주무관

백창진

백창진

-강일고등학교 외 10개소 아리수 음수대 배관 설치 공사-

설계 변경 심의 사전 설명서

공사 개요

○ 공사명: 강일고등학교 외 10개소 아리수 음수대 배관 설치 공사

○ 도급자: 한미기전(주) 대표 박종민

○ 공사 기간: 2018. 6. 14.~2018. 11. 1.

○ 공사 개요: 음수대 배관 설치 D=15~30mm, L=301m

○ 계약 금액: 금20,328,300원

설계 변경 현황

○ 물량 변경 내역

구분	부설 연장(m)		증·감 (m)
	당초	**
D=15~30mm	301	***	****

○ 금액 변경 내역

구분		물량(원)		증감(원)
		당초	**
총공사비		20,328,300	**********	***********
도급비	공급가액	18,480,273	**********	***********
	부가가치세	1,848,027	*********	***********
	소계	20,328,300	**********	***********

○ 사유: 현장 시공여건 변화에 따른 신규공종 및 계약물량 변경 발생

- 설치 배관 연장 감소(당초 301m → 변경 209m) 및 이에 따른 보온재(가교발포폴리에틸렌보온) 수량 감소

- 강일고등학교→배관 설치 필요 없음

- 상일동주민센터, 천일초등학교, 광문고등학교, 고덕중학교, 강동구청, 암사정수장 → 기 설치된 내식성 배관을 활용하여 배관 연장 및 코아드릴 물량 감소

- 묘곡초등학교, 강동초등학교→시공여건 변화로 공사 연장 및 코아드릴 물량 증가

구분	강일고	상일동	천일초	묘곡초	강동초	광문고	고덕중	강동 구청	암사 정수장	보건소 (강일)
**	*	**	**	**	**	***	**	**	**	**
**	*	*	*	**	**	**	**	*	*	*
**	**	***	**	**	***	***	***	**	***	**

- 텍스설치 및 철거 물량 증가: 증 35m2

- 케이블 신설 물량 증가: 증 156m

- 배수펌프 설치: 증 4개소

특이사항

○ 관련 문서: 시설관리과-17378(2018. 9. 21.)

○ 본부에서 추진한 하반기 아리수 음수대 추가 수요조사로 추가 공사물량이 발생, 계약상대자가 추가 공사 이행 불가 통보

************************************************

*****************************************************

설계 변경 심	의(검토) 내역

○ 물량 변동의 적정성 여부

○ 관련 규정 및 적법성 여부

○ 설계 변경 세부 내용 및 사유

붙임  1. 심의 위원회 개최 공문 1부.
2. 설계 변경 내역서 1부.

3. 관련 보고서(시설관리과-17378) 1부.  끝.