문서번호	도시철도설비부-9887
결재일자	2018.10.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정보통신과장	도시철도설비부장
배종수		추경수	10/24 구자훈
협 조

- 지하철 9호선 연장건설(3단계) 정보통신공사 -

제2회 설계변경 자문(소)위원회 자문 결과보고

2018. 10.

서울지하철 9호선 연장건설(3단계) 정보통신공사

제2회 설계변경 자문위원회(소위원회)자문 결과보고

지하철 9호선연장건설(3단계) 정보통신공사 설계변경  자문(소)위원회를 개최하고  결과를 보고드림.

Ⅰ		공사개요

공 사 명 : 서울지하철9호선 연장건설(3단계) 정보통신공사

공사규모 : 본선 10.48km, 8개정거장 정보통신공사

공사기간 : ‘14.12.31 ~‘18.12.30

시 공 사 : ㈜일광기업 (감리단 : ㈜대영유비텍)

계약 및 준공 현황

단위:천원

구 분		총 차	1 차(준공)	2 차(준공)	3 차	4 차
1구간	공사기간	‘14.12.31 ~ ‘18.01.11	‘14.12.31~ ‘15.12.10	‘15.11.23 ~ ‘17.07.31	‘17.02.13 ~ ‘18.12.30
	도급금액	6,557,700	400,000	1,000,000	5,157,700
2구간	공사기간	‘14.12.31 ~ ‘18.01.11	‘14.12.31~ ‘15.12.10	‘15.11.23 ~ ‘16.12.02(준공)	‘16.10.21 ~ ‘17.12.12(준공)	‘18.01.22~ `18.12.30
	도급금액	6,404,534	210,000	735,000	3,594,000	1,865,534

Ⅱ		설계변경 자문회의

일 시 : ‘17. 10. 23(화) 14:00 ~17:00

장 소 : 도시철도설비부 회의실

심의내용 :설계변경 적정성 여부 심사

위원회구성

구 분		소 속 및 직 위	성 명	비 고
위 원 장		정보통신과장	추경수
간 사		정보통신과 방송통신6급	정덕환
자문위원	내부	정보통신과 정보통신 전문관	박규영
		송변전과 공업6급	이재영
	외부	서울메트로9호선운영(주) 개통준비단장	이성계
		에스트래픽(고문)	조덕영
		㈜안세기술 이사	김남환

심의안건 :발주처지시 및 현장여건에 따른 변경사항 12개 공종

Ⅲ		심 의 결 과

심의 결과 : 조건부가결

자문내용

▷ 설계변경 관련 설계변경 사유의 적정성, 단가적용 및 변경물량의 적정성, 변경되는 공법의 적정성 등을 검토한 결과

- 정거장 안전구역 통신설비공사 신규품목(적외선센서, 인터폰, 제어함)에 대한 규격 세부보완 검토.

- 특별피난 계단 음영구역 해소 공종은 신규공종이므로 노무비는 설계 변경시의 시중노임단가 및 정보통신표준품셈(2018)에 낙찰율을 적용하는 것으로 사료됨

▷ 안전구역 센서 규격이 명확하지 않기 때문에 정확한 규격제시

▷ 방사형케이블 적용방식 신규제품인 경우와 실제 일위대가와의 차이점, 어떤 기준으로 변경 하였는지 검토

▷ 붙임파일 일부 견적서가 서로 상이한 만큼 동일하게 제출

▷ 총차(1,2구간), 3차(1구간), 4차(2구간) 설계변경 물량 증·감에 대하여 E/S금액 정산요함

▷ 안전구역 통신설비 : 세부규격 명기 요함

▷ 안전구역 통신설비/ 특별피난계단 음영구역해소

- 신규 품목에 대하여 2018년에 변경된 표준품셈 적용검토 요함

▷ 설계변경 증·감분에 대하여 E/S금액정산 검토

▷ 콜폰 신규폼목 적용으로 금액이 감액되었는데 동일이상 성능을 유지하거나 향상된 것이면 신기술 도입으로 검토하여 감액처리하지 않는것도 검토필요

▷ 경비(보험료 및 안전관리비)등에 대한 설계변경 적용금액은 공사 준공시점 실비지출 금액을 반영하여 설계 변경 적용

▷ 총차금액 중 미준공분에 대한 E/S는 감액 적용하여 설계변경 적용요

Ⅳ		행정사항

설계변경 자문위원회 개최결과 감리단 통보

- 자문결과 내용 보완 조치 후 설계변경 추진

외부자문위원 자문비 지급 : 450,000원

- 150,000☓ 3명(기본100,000원, 2시간 초과 50,000원)

※ 2017년도 예산편성 기준(2016.7)

붙임 : 설계변경 소(본부)위원회 자문결과 및 검토의견서 각 1부. 끝.