내 삶을 바꾸는 서울 10년 혁명
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	준공기한 연기요청(동호대교 보수공사)

1. 교량안전과-18444호(2018.10.23.)와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련하여 『동호대교 보수공사』에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 동호대교 보수공사

나. 공사기간 : 2018.05.08. ~ 2018.11.03

다. 도 급 자 : ㈜남경씨엔아이 대표 오장근

라. 준공기한 변경 요청내용

- 당초 : 2018.05.08. ~ 2018.11.03

- 변경 : 2018.05.08. ~ 2018.11.30

마. 귀책사유 : 서울특별시(지체상금 미부과)

바. 연기사유 : 별첨 준공기한 연기의뢰서 참조

사. 예산과목

- 교량관리, 한강교량관리, 동호대교보수공사, 시설비 및 부대비,                           시설비.

붙임 1. 준공기한 연기 검토 보고서 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	교량안전과장
주무관	임승민		특수교량팀장	정준용		교량안전과장	10/24 代박동욱
협조자
시행	교량안전과-18551	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 1동 2층 교량안전과 (서소문동)	/
전화	02-2133-1954	/전송	02-2133-1429	/		/	부분공개(5)