문서번호	설비부-14458
결재일자	2018.10.24.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
박도원		오삼록	10/24 권오식
협조

『남산예장자락 재생사업 기계설비공사』

관급자재 납품기한 연기 검토보고

(냉․난방기, 공기순환기)

2018. 10.

도시기반시설본부

( 설 비 부 )

『남산예장자락 재생사업 기계설비공사』

관급자재 납품기한 변경 검토보고

『남산예장자락 재생사업 기계설비공사』에 소요되는 관급자재 설치시기가 미도래하여 납품기한 연기에 대해 검토 보고 드림.

1		관급계약 현황

□ 공 사 명: 남산예장자락 재생 기계설비공사

□ 관급자재 계약현황

(단위 : 천원)

연번	계약건명	계약금액	납품기한	납품기한	계약자	비고
1	공기순환기 추가 구매	*****	‘18.10.27.	30일	엘지전자(주)
2	냉난방기 추가 구매	******	‘18.11.13.	60일
합 계		******

2		관 련 근 거

□ 다수공급자계약 특수조건 제6조의3(납품요구), 제7조(납품이행 등)

○ 명시이월 예산으로 당초 납품기한을 ‘19.12.31.까지 요청하였으나,

○ 조달청에서 잦은 민원 발생으로 관련 규정에 의거 제품별 납품기한으로 계약체결 후 수요기관에서 납품기한 연기토록 업무 변경됨.

□ 감리 제2018-345호(2018.10.22.) 관급자재 납품기한 연기요청

3		검 토 내 용

□ 현장 납품시기 미도래로 기계설비공사 관급자재 납품기한 연기 검토

□ 납품기한 연기

○ 연기사유: 선행공정의 미시공에 따른 관급자재 납품기한 조정

○ 관급자재별 연기기한

연번	계약건명	계약금액	당초	변경	비 고
1	공기순환기 추가 구매	*****	‘18.9.27.~ 10.27.	‘18.09.27~ ‘19.12.31.	증 430일
2	냉난방기 추가 구매	******	‘18.09.14.~ 11.13.	‘18.09.14~ ‘19.12.31.	증 413일

(단위 : 천원)

□ 건설사업관리단 의견

○ 선행공정의 미시공에 따른 관급자재 납품기한을 선행공정 준공기한(‘19.12.31.)에 맞춰 연기하고자 함.

4		조 치 의 견

□ 관급자재 납품기한 연기가 감리자 검토의견과 같이 적정하다고 판단되므로 총무부로 변경계약 의뢰하고자 함.

○ 귀책소재: 서울특별시 도시기반시설본부

○ 지체상금 부과여부: 미부과

붙임  감리검토 의견서 1부.  끝.