내 삶을 바꾸는 서울 10년 혁명
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	준공기한 연기 의뢰(국회대로 1단계 잔여)

1. 도로계획과-13495호(2018.10.23.)와 관련입니다.

2. 우리과에서 시행중인 ‘국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계-잔여구간) 기본 및 실시 설계용역’에 대하여 다음과 같이 준공기한 연기 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계-잔여구간) 기본 및 실시설계용역

나. 계 약 자 : ㈜유신외 1개사

다. 준공기한 연기내역 : 당초) 2018.10.31. → 변경) 2018.12.31

라. 연기사유

- 2단계 구간과 환기 및 방재와 관련한 장비선정과 시설물 배치, 그에 따른 구조물 형식 및 규격을 2단계와 연계하여 통일된 방식으로 변경하고,

- 그 설계 결과로 특정공법 선정심의, 자문회의 및 설계VE 등을 반영하여 실시설계 성과품을 작성하기 위한 추가 설계기간 필요

마. 귀책사유 : 서울특별시

붙    임 : 1. 준공기한 연기의뢰서 1부.
2. 준공기한 연기방침서 1부.
3. 용역계약 변경합의서 1부.  끝.

	도로계획과장
전문관	김상익		민자사업팀장	조용상		도로계획과장	10/24 代정회원
협조자
시행	도로계획과-13562	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 (태평로1가) 서울시청 본관 10층 도로계획과	/
전화	02-2133-8066	/전송	02-2133-0763	/	si3219@seoul.go.kr	/	부분공개(5)