★

문서번호	치수과-16385
결재일자	2018.10.24.
공개여부	대시민공개

담 당	하수담당	치수과장		안전건설교통국장
권재환	김익기	송기민		10/24 하순호
협 조					기획예산과장		한재헌
					재무과장		김영임
					예산담당		유미조
					계약담당		이계웅

2018년 관내1,2구역 간선도로 빗물받이 준설공사(연간단가) 추가경정 예산 및 낙찰차액 사용계획 보고

2018. 10.

안전건설교통국

( 치  수  과 )

- 2018년 관내1,2구역 간선도로 빗물받이 준설공사(연간단가) -

추가경정 예산 및 낙찰차액 사용계획 보고

집중 호우 시 관내 주요도로의 노면의 원할한 배수처리를 위하여 시행중인 『관내 1구역 간선도로 빗물받이 준설공사(연간단가)』와  『관내 2구역 간선도로 빗물받이 준설공사(연간단가)』 예산이 소진 되어, 향후 발생하는 간선도로변 빗물받이에 낙엽 및 쓰레기 등 협잡물 퇴적으로 인한 배수불량  민원처리에 소요되는 공사비를 추경예산 및 낙찰차액을 활용하고자 함

□ 사업개요

구 분	1 구역	2 구역
공 사 명	2018년 관내1구역 간선도로 빗물받이 준설공사(연간단가)	2018년 관내2구역 간선도로 빗물받이 준설공사(연간단가)
공사기간	2018.04.09.~2018.12.31.	2018.3.30.~2018.12.31.
총공사비	120백만원(구비100,시비20)	156백만원(구비100, 시비56)
수 급 자	주건엔지니어링(주) 박광직	목민종합건설㈜ 이승훈
공사규모	·빗물받이 기계준설 : 6,399개소 ·연결관 준설 : 980개소	·빗물받이 기계준설 : 8,304개소 ·연결관 준설 : 2,270개소

□ 추진현황

○ 2018. 2. : 공사 발주

○ 2018. 3. : 공사 착공

○ 2018. 4. : 제1차 작업지시

○ 2018. 7. : 제2차 작업지시

○ 2018.12. : 공사 준공예정

□ 예산현황

○ 예산확보 현황

[단위 : 천원]

구 분	합 계	본예산	추 경	비고
합 계	356,000	276,000	80,000	구비 : 280,000 시비 : 76,000
1구역	150,000	120,000	30,000	구비 : 130,000 시비 : 20,000
2구역	206,000	156,000	50,000	구비 : 150,000 시비 : 56,000

○ 예산과목

- 치수과, 하천 및 하수시설 정비, 하천 및 하수시설 유지관리,

하수도 유지관리, 시설비 및 부대비 - 구비

- 물재생계획과, 사업비용, 영업비용, 관거비, 수선유지교체비,

수선 유지비 - 시비

□ 현황 및 문제점

○ 상기 공사는 간선도로변 빗물받이에 낙엽 및 쓰레기 등 협잡물   퇴적에 따른 배수불량 등 주민생활과 밀접한 민원의 해소를 위하여 주요 간선도로에서 시행하는 공사로서 차수별 작업지시를 통하여 추진되어 왔으나,

○ 작업지시에 따른 공사내역을 정산한 결과 기 계약된 도급비가 소진 되어 현재 접수된 민원 및 추가적으로 발생하는 민원에 대응이 어려운 실정임

- 1구역 도급비 : 102,164천원 (지출액  55,704천원)

- 2구역 도급비 : 131,313천원 (지출액 127,210천원)

□ 조치계획

○ 현재 처리중인 민원사항(붙임참고)을 포함하여 추가로 접수되는 빗물받이 배수불량 관련 민원해결을 위하여 각 공사의 추경예산 및 낙찰차액을 사용하고자 하며,

- 1구역 추가공사비 : 43,836천원

· 추    경 : 30,000천원(추경)

· 낙찰차액 : 13,836천원

- 2구역 추가공사비 : 68,686천원

· 추    경 : 50,000천원(추경)

· 낙찰차액 : 18,686천원

○ 우리구와 기 계약되어 추진중에 있는 『관내1구역 간선도로 빗물받이 준설공사(연간단가)』및『관내2구역 간선도로 빗물받이 준설공사(연간단가)』에 작업지시하여 정비하고 추후 설계변경 시 반영하여 처리   하고자 함.

붙 임 : 1. 관내1구역 빗물받이 준설대상 현황 1부.

2. 관내2구역 빗물받이 준설대상 현황 1부.  끝.