문서번호	시설과-9954
결재일자	2018.10.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		시설과장
차승현		10/24 송병욱
협 조

「국사봉배수지 건설공사」

계약금액조정 심사 소위원회 개최

(송수관로 구간 폐기물 처리 및 노선변경)

2018. 10.

상수도사업본부

(시 설 과)

「국사봉배수지 건설공사」

계약금액조정 심사 소위원회 개최

(송수관로 구간 폐기물 처리 및 노선변경)

1
		공사개요

○ 공 사 명 : 국사봉배수지 건설공사

○ 공사개요 : 배수지 신설 12,000㎥

송배수관 부설 D=200~1,000mm L=3.4km

○ 공사기간 : 2016. 12. 1. ~ 2019. 5. 19.

○ 도 급 비 : 8,873백만원(3차수 : 4,445백만원)

○ 시 공 사 : 청광종합건설㈜ 대표 허 숭

○ 감 리 사 : ㈜대한콘설탄트 대표 이우정 외 2개사

2
		계약금액조정 내용

1. 건설폐기물 신규 발생 및 관악로 송수관(D700mm) 부설 구간 노선 변경 검토

○ 관악로 송수관로 부설구간 생활쓰레기, 건축잔재 등 폐기물 신규 발생

○ 폐기물 발생 수량

폐기물 종류	체적(㎥)	중량(톤)	비 고
철근 콘크리트	756	1,814
혼합폐기물	302	516
합 계	1,058	2,330

○ 송수관 부설구간인 관악로의 당초 설계된 3차로에서 도로확장전 미철거된 건축물의 간섭과 매립된 생활폐기물 등 발생량을 최소화 하기 위해 공사 진행구간을 2차로로 변경 부설

2. 공사비 증․감 현황

○ 시설공사 도급비

구 분	당 초	변 경	증·감
도급비	***********	************	*************

○ 폐기물처리용역

구 분	당 초	변 경	증·감
용역비	**	***********	***********

3
		설계변경 근거

○ 지방자치단체 공사계약일반조건 제6절 공사 설계의 변경 1.설계변경 가. 설계변경은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한다.

1) 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우

2) 지질, 용수등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우

4
		소위원회 개최

○ 일  시 : 2018. 10. 30.(화) 16:30 ~ 17:30

○ 장  소 : 시설안전부 회의실

○ 심사위원

- 팀 장 : 시설과장

- 팀 원

소 속	직 급	성 명	비 고
시 설 과	6급	윤 걸
시 설 과	7급	문 정 주
시 설 과	7급	김 기 봉

붙임 : 실정보고서 및 내역서 각 1부.  끝.