문서번호	설비부-14468
결재일자	2018.10.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시책사업과장	설비부장
윤대영		代박경철	10/24 권오식
협조

‘서울시 근로자복지관 증축 기계공사’

관급자재 납품기한 연기 검토

2018. 10.

도시기반시설본부

(설비부)

‘서울시 근로자복지관 증축 기계공사’

관급자재 납품기한 연기 검토보고

『서울시 근로자복지관 증축 기계설비 공사』 관련, 관급자재 납품기한 연기를 위한 검토 사항을 보고 드림.

1		공사개요

❍ 공 사 명 : 서울시 근로자복지관 증축 기계 공사

❍ 위    치 : 영등포구 국회대로 44길 10(영등포동 7가 57)

❍ 공사규모 : 지하1층/지상5층 (연면적 3,776㎡)

- 지상5층 리모델링 및 1개층 수직증측(6층,454㎡)

❍ 공사기간 : 2018. 09. ~ 2019. 05.

❍ 공 사 비 : 342백만원(도급 168백만원, 관급 174백만원)

❍ 시 공 사 : 태성(주) 대표 박차출

❍ 위탁감독 : 서울시설관리공단

2		관련근거

❍ 공사감독3처-10982(`18.10.24) :『관급자재 납품기한 연기요청』에 관한

검토 보고서 제출

3		검토보고내용

❍ 관급자재 납품기한 연기내용

품 명	계약번호	계약업체	계약금액(원)	납품 기한		비 고
				당 초	변 경
냉난방기실외기 구매(GHP)	00168161616	㈜삼성전자	45,461,280	2018.10.29.	2019.05.27.	· 계약 금액 변경 없음
냉난방기실내기 구매(GHP)	00178156603	㈜삼성전자	33,660,000	2018.10.29.	2019.05.27.

❍ 연기 사유

- 선행 공종(건축) 준공 일정상 관급자재 납품 시기 미도래

❍ 귀책소재 : 도시기반시설본부

❍ 지체상금 부과 여부 : 미부과

4		보고자 의견

❍  관급자재 설치 시기가 미도래 하여 관급자재 납기를  연기 조치하여               공정관리에 만전을 기하고자 합니다.

따로붙임 : 관련공문 및 합의 각서 각 1부. 끝.