문서번호	시설보수과-5822
결재일자	2018.10.24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
이생기		윤승범	10/24 代이희신
협조

준공기한 연기 보고 (청계천 좌안 물막이공사 건설사업관리 용역)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018.10.

중랑물재생센터

(시설보수과)

준공기한 연기 보고

(청계천 좌안 물막이공사 건설사업관리 용역)

『청계천 좌안 물막이공사 건설사업관리(시공감리) 용역』준공기한 연기요청에 따라 시공감리에 만전을 기하기 위하여 준공기한을 연장하고자 함.

[관련근거 이준 2018-151(2018.10.23.)]

□ 용역현황

○ 용역명 : 청계천 좌안 물막이공사 건설사업관리(시공감리) 용역

○ 계 약 자 : ****************

○ 용역금액 : 30,412,600원

○ 용역기간 : 2018. 8. 1. ~ 2018. 10. 29.

□ 준공기한 연기사유 및 기간

○ 연기사유

- “청계천 좌안 물막이공사 건설사업관리(시공감리) 용역” 용역 기간이 “청계천 좌안 물막이공사” 준공기한이 ‘18.11.30일까지 설계변경 및 준공에 따른 절대공기 부족으로 준공기한 연기요청이 있음.

- 설계변경 및 준공에 만전을 기하기 위해 본 용역 준공기한을 연기

하고자 합니다.

○ 준공기한 연기 : 당초 2018. 10. 29

변경 2018. 11. 30

□ 조치의견

○ 계약 상대자인******************에게 용역 준공기한 연기내용을 통보하여 변경계약을 추진 하고자 합니다.

- 지체상금 부과여부 : 미부과

따로붙임 : 1) 준공기한 연기요청 1부.

2) 합 의 서 1부.  끝