투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	설계용역 계약변경 의뢰(시립마포 실버케어센터 건립)

1. 건축부-14939(2018.10.23.)호와 관련입니다

2. 우리 본부에서 시행중인 『시립마포 실버케어센터 건립 설계용역』과 관련하여 다음과 같이 계약변경 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용역명: 시립마포 실버케어센터 건립 설계용역

나. 계약자: ㈜에이텍종합 건축사사무소(대표: 김상길)

다. 변경내용

구 분	당 초	변 경	비 고
용역기간	‘17.12.20 ~ ’18.11.14	‘17.12.20 ~ ’19.01.16	증64일
용 역 비	983,000,000 원	1,148,440,000 원	증165,440천원

라. 변경사유: 『서울창업허브단지』 조경설계(디지털창업과) 과업추가

마. 예산과목

- 디지털창업과, 디지털산업 육성, 체계적창업시스템 구축, 서울창업허브 조성, 시설비

- 복지본부 어르신복지과, 어르신복지 수준향상 및 장사시설 운영 내실화, 치매어르신지원강화, 어르신 복지시설 설치지원, 시설비

붙 임: 1. 설계용역 기간연장 검토보고 1부.

2. 예정공정표 및 합의각서 1부.  끝.

	건축부장
주무관	김재호		의료시설과장	이형재		건축부장	10/24 임인구
협조자
시행	건축부-14991	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2606	/전송	02-3708-2659	/		/	부분공개(5)