투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경(3차) 시행- 2018년 도로손상부분 긴급복구공사(연간단가)

우리사업소에서 시행중인 『2018년 도로손상부분 긴급복구공사(연간단가)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(3차)을 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2018년 도로손상부분 긴급복구공사(연간단가)

나. 공사기간 : 2018. 03. 12~ 2018. 12. 31

다. 계약금액 : ***************

라. 도 급 자 : ******************

마. 설계변경사유

○ 도로노후에 의한 도로소파, 망상균열 등 포트홀 예상구간에 소규모 정비물량이         당초 예상물량보다 증가 발생

○ 동공탐사분 속경성 고유동 채움재주입 신규공종 발생

바. 변경내역                                                    (단위 : 원)

공 종	금 액(원)			비 고
	당 초	변 경	증 ․ 감
계	*************	*************	***********
도급비	*************	*************	************
관급비	***********	***********	***********
이전비	***********	**********	***********

사. 예산과목

- 도로시설물관리, 도로 및 도로부속물 관리, 노후포장도로정비공사, 시설비             **************

- 도로시설물관리, 도로및도로부속시설물, 도로함몰예방사업, 시설비              ************

붙임 : 1, 설계변경 검토보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 건설사업관리책임기술자 검토의견서(별첨). 끝. .

주무관	하승환		도로보수과장	이상호		성동도로사업소장	10/25 신상식
협조자	관리단속과장	박영종
시행	도로보수과-4423	(		)	접수		(		)
우	04807	서울특별시 성동구 자동차시장길 41	/
전화	02-2210-1537	/전송	02-2210-1549	/	hsh1647@seoul.go.kr	/	부분공개(5)