변경계획보고서

문서번호	정보자원운영과-7162
4526750000003735

주무관	주무관	정보자원운영과장
전인탁	임연주	10/25 김기항
협조
	전문관		최성수

제목	업무관리 통합스토리지 교체 및 이관 작업
문서번호	*************
등록자	***	요청일시	2018-10-25 07:33:55
변경등급	***	변경근거	개선
장애조치코드	-
변경구분	System
System	*****************************************************************************************	Network	-
Disk	-	Backup	-
자산변경유무	자산변경 있음	서비스중단유무	서비스중단 있음
작업시작일자	****************	작업종료일자	****************
서비스중단 시작시간	****************	서비스중단종료시간	****************
작업자	**************************
작업결과

변경내용

○ 작업내용

- 2018년 정보자원 통합인프라 구축사업 관련하여 내용연수 경과된

업무관리 통합스토리지 교체 및 이관작업을 하고자 함

○ 대상장비

**	*******	*******	**
****	***********	*************	Usable120TB
****	********** ********** ************ ************ ******* ******* ************* *************	********** ********** ************ ************ ******* ******* ************* *************

○ 작업일시 : ****************************************

○ 작업자 : **************************

변경절차

작업 분류	작업 시간	작업 내용	비고
사전 작업	10/15(월) ~ 10/22(월)	- 기존 스토리지 복제 파라메터 변경 및 라이선스 입력 - 기존 스토리지 및 신규 스토리지 간 복제 구성 - ODM 및 HDLM 파일 업로드(*********)	** ***** ******
작업 진행	10/26(금) 19:00 ~ 10/27(토) 09:00	- 서비스 중지 ******************	** ***** ****** ****
		- ******************복제 상태 확인 후 복제 중지 - 대상서버 11대 파일시스템 Umount
		- ODM 및 HDLM 설치 (대상서버 11대) - SAN 스위치 조닝 구성 및 FC 케이블 연결 - 기존 스토리지 FC 케이블 분리
		- 신규 스토리지 각 포트 별 디스크 할당 - 각 서버별 할당 된 디스크 확인 ******** - 각 서버별 Mount 및 파일시스템 최종 확인
		- 서비스 기동 ******************

○ 작업 내용

※첨부 : 상세작업 내용 참고

복구대책

○ 이상발견시 원상복구

작업결과