＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	상수도사업본부
수신	재무회계과장
(경유)
제목	하도급 변경계약 서류 송부(낙산배수지 건설공사)

1. 우리 본부에서 시행중인 『낙산배수지 건설공사』의 시공자로부터 제출된 하도급 변경계약이 검토결과 적정하여 붙임과 같이 변경계약 서류를 송부합니다.

가. 공 사 명 : 낙산배수지 건설공사

나. 시 공 자 : ㈜엔씨종합건설 대표 임진규 외 1개사

다. 하도급 내용

공 종	구 분				비고
	업체명	원도급금액(원)	하도급금액(원)	하도급율(%)
철근콘크리트공사	동화이엔지㈜ 대표 이호석	266,481,637	252,450,000	94.73	적정

라. 변경 내용 : 공사기한 연장(당초 2018.09.20. → 변경 2018.11.15.)

붙임 : 1. 하도급 변경계약 서류 1부

2. 하도급계약 검토 체크리스트 1부.  끝.

	시설안전부장
주무관	윤걸		시설과장	송병욱		시설안전부장	10/25 이규상
협조자
시행	시설과-9981	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02)3146-1494	/전송	02)3146-1529	/		/	부분공개(7)