문서번호	조경과-14119
결재일자	2018.10.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	조경관리팀장	조경과장
이진범	송동명	10/25 문길동

가리봉동 측백나무 보호수

정자마당 쉼터조성사업 예산 추가배정 검토보고

2018. 10.

푸른도시국

조  경  과

가리봉동 측백나무 보호수

정자마당 쉼터조성사업 예산 추가배정 검토보고

구로구 가리봉동 측백나무 보호수 쉼터조성 사업과 관련하여 자치구에서 예산 추가배정 요청에 따라 아래와 같이 그 내용을 검토하고 보고드림

쉼터 조성사업 개요

❍ 위    치 : 구로구 가리봉동 13-148번지

❍ 면    적 : 99㎡

❍ 사업내용 : 건물철거 및 쉼터조성 등

❍ 사업기간 : 2018. 8. ~ 11.

❍ 사업금액 : 55백만원

위치도	계획도

사업 추가내용 : 계단설치

❍ 기 조성된 정자마당과 인접한 지역에 금회 쉼터 조성

❍ 정자마당과 쉼터 이용시 옹벽으로 인해 우회해야 하는 불편이 있음

❍ 정자마당 옹벽에 쉼터와 연결되는 계단을 설치하여 보행 불편 해소

- 계단규격 : 길이 5m X 높이 2m X 폭 1.8m

- 소요예산 : 8,240천원(세부내역 붙임문서 참조)

※ 계단설치 민원내용

○ 접수일시 : 2018. 10. 12.(금)-가리봉동 정자마당 측백나무 제례행사시

○ 민  원  인 : 가리봉동 주민자치위원장, 시의원, 구의원 등 주민 다수

○ 민원내용 : 정자마당과 현재 조성중에 있는 쉼터를 연결하는 계단설치 요청

검토내용

❍ 계단설치시 접근성이 향상되며, 옹벽으로 분리되어 있는 두 공간을 연계하여 하나의 복합문화공간으로 시민들에게 제공할 것으로 기대

❍ 계단 설치예정 장소내 식재된 관목 및 초화류는 정자마당내 타 녹지대로 이식 조건으로 추가사업을 시행

※ 예산과목 : 조경과, 생활주변 녹지확충, 생활주변 녹지확충, 지정보호수 유지관리, 시설비

향후계획

❍ ‘18. 10. 26. : 예산 재배정

❍ ‘18. 10.      : 설계변경 및 추가공정 시행

❍ ‘18. 11.      : 사업 준공

붙임문서 1. 정자마당 계단설치 현황사진 1부

2. 계단도면 및 내역서 각 1부.  끝.