문서번호	교량안전과-18639
결재일자	2018.10.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
장재연		代이우근	10/26 김종호
협조	주무관		우창원
	주무관		임승민

『잠실대교 보수공사 외 3건』

예비준공검사 실시 계획

2018. 10.

안전총괄본부

(교량안전과)

『잠실대교 보수공사 외 3건』

예비준공검사 실시 계획

「잠실대교 보수공사 외 3건」 준공 시기가 도래함에 따라 예비준공검사를 실시하여 준공 전 미흡한 사항을 사전에 보완하고자 함

□ 근    거

○ 기술심사담당관 제10083호(2018.6.28.)

- 건설공사 예비준공검사 시행 방법 개선

○ 국토교통부고시 제 2015-473호(2015.6.30.)

- 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제104조

(준공검사 등의 절차)

○ 부시장방침 제171호(2013.5.20.)

- 예비준공검사 이행실태 점검결과 개선대책 보고

□ 공사개요

공 사 명	공사기간	공사내용	총공사비 (천원)	시공사
잠실대교 보수공사	2018.5.24.∼ 11.19	· 교면방수 및 포장 : 71.6a · 바닥판 보수 : 27㎡	775,423	덕우건설(주)
한강상 PSC교량 안전강화공사(올림픽대교)	2018.6.22.∼ 11.18	· 교면방수 및 포장 : 83.85a · 바닥판 보수 : 94.5㎡ · 보도정비 : 26.11a	1,796,000	명우엔지니어링(주)
한강상 PSC교량 안전강화공사(원효대교)	2018.5.25.∼ 11.20	· 교면방수 및 포장 : 91a · 바닥판 보수 : 1,090㎡	1,916,000	에스디그룹(주)
동호대교 보수공사	2018.5.08.∼ 11.30	· 교면방수 및 포장 : 47.9a · 보도부 포장 : 994㎡	1,001,307	(주)남경씨엔아이

□ 예비준공검사 계획

공 사 명	검사일시	검사자	입회자
잠실대교 보수공사	2018.10.26.(금) 10:30~	· 시설7급 임승민 · 시설7급 장재연	한강교량 보수·보강공사 건설사업관리단 및 현장대리인
한강상 PSC교량 안전강화공사(올림픽대교)
한강상 PSC교량 안전강화공사(원효대교)	2018.10.29.(월) 10:30~	· 시설6급 우창원 · 시설7급 임승민
동호대교 보수공사

○ 검사방법

- 정산설계도서(설계변경 내역서, 도면, 검측내역 등) 적정 여부

- 시공상태 적정 여부

- 지급자재 사용 적정 여부

- 폐품 및 발생물의 유무 및 처리의 적정 여부 등

□ 향후계획

○ ’18.11.02. : 검사결과 보완조치 완료

○ ’18.11.     : 공사 준공

붙임 : 예비준공검사조서(서식) 1부.  끝.